číslo smlouvy objednatele:  S/0501/2018/IO			číslo smlouvy zhotovitele: 841/OBDE/255/2018
číslo dodatku objednatele:  S/0501/2018/IO/III	

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0501/2018/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx– vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxx

xxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx/email: xxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

STRABAG a.s. 
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena Ing. Klárou Kalábovou – ekonomem Oblasti Střed, o.z. Morava
                    tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxx
                    Ing. Vítězslavem Bujnochem – vedoucím OTÚ Oblasti Střed, o.z. Morava
                    Tel: xxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxx
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 7634
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx
ID datové schránky: 8yuchp8
Kontaktní osoba ve věcech technických:xxxxxxxxx – vedoucí Provozní jednotky,
              tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.10.2018 na stavební práce pod názvem „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Na SO 203 došlo z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla k záměně položek:
Dodavatel stavby navrhuje změnu osazení projektem navrženého vícelamelového mostního závěru u OP4 za jednoduchý dilatační závěr (DZ), jež má z hlediska údržby minimálními náklady na údržbu v delším časovém horizontu (např. výměna těsnící gumy). Dilatační závěry budou provedeny jak je uváděno v původním projektu v tichém provedení. Mostní závěr pro OP1 bude použit s posunem do 120mm oproti posunu do 100mm stanoveném v zadávací dokumentaci, tzn. z technologického hlediska v lepším provedení. Na OP4 oproti vícelamelovému DZ navrženému v podkladovém projektu je u jednoduchého MZ nižší riziko vzniku poruch a s tím související možnosti zatékání vody na nosnou konstrukci a opěru, která může vyvolat rychlejší degradaci betonového povrchu. Tato změna je zdůvodněná v souladu odst. 7 ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ),  jelikož se jedná se o náhradu za kvalitativně stejnou, resp. vyšší úroveň stavebních prací při zpracování díla na této části, oproti předpokládanému způsobu provedení dle projektové dokumentace a nemá vliv na výši ceny díla.

K dodatečným pracím na SO 203 došlo z objektivních důvodu dle skutečnostem vzniklým během realizace díla:
Při zpracování výrobně technické dokumentace skruže nosné konstrukce SO 203 bylo zjištěno neúnosné, nestabilní podloží svahu v rámci tohoto objektu u opěry mostu č. OP 4 pro tak velké zatížení, které bude vyvolané váhou skruže, samotného bednění a ukládaným materiálem (výztuž, beton nosné konstrukce). Geotechnik proto navrhl provést nezbytné zpevnění svahu pomocí 8 ks mikropilot, dlouhých 12m, které budou zainjektovány do zvětralých hornin. Tuto situaci nemohl ani zadavatel, ani zhotovitel předvídat, jelikož geologický průzkum ze zadávací dokumentace (podkladové projektové dokumentace) byl zcela odlišný a navíc nebyl přímo v tomto místě proveden. Za této situace, kdy nesoulad geologických poměru byl zjištěn až při realizaci díla a má zásadní vliv na provedení díla dle stavebně technologických parametrů pro stavby tohoto druhu – mostů, je nutno tyto práce provést a zaplatit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
K výše uvedeným skutečnostem došlo během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat.
Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. 5 a 6, které jsou přílohou tohoto dodatku č.3.

1.2.	Původní článek 3. Doba, místo plnění, odstavec 3. se doplňuje o následující ujednání:
1.2.1.	Strany deklarují, že:
a)	na základě článku 3 doba a místo plnění je zhotovitel povinen provést dílo v části SO 115, SO 206 a SO 433 do 15. měsíců od nabytí účinnosti smlouvy,
b)	na základě článku 3 doba a místo plnění je zhotovitel povinen provést dílo v části SO 112, SO 203 a SO 431 do 12. měsíců od účinnosti smlouvy,
c)	s ohledem na překážky vyvolané nadřazenou stavbou D48 Frýdek-Místek, obchvat, jejichž investorem je ČR ŘSD a zhotovitelem sdružení Společnost FM, obchvat – I. etapa, vedoucí sdružení Porr a.s., bylo možno zhotoviteli předat staveniště nejdříve dne 15.07.2019, 
a proto:
1.2.2.	Termín dokončení díla v rozsahu SO 115, SO 206 a SO 433 je určen dle tohoto ujednání na den 15. 10. 2020.
1.2.3.	Dílčí termín dokončení díla v rozsahu SO 112 a SO 203 a SO 431 do 12 měsíců od předání a převzetí staveniště se tímto dodatkem prodlužuje celkem o 79 dnů, a to na základě:
a)	Nepříznivých klimatických podmínek za období od 17.02.2020 do 03.03.2020. Práce ke dni 17.02.2020 nebylo možné zahájit z důvodů nepřístupnosti k části stavebního objektu SO 203, způsobeného nesjízdnosti hlavní trasy D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa. Zahájení prací bylo možné 4. března 2020. Doba přerušení prací činila 16 dnů. 
b)	Technologické přestávky v nezbytně nutné délce 100 dnů od betonáže mostní konstrukce po zabetonování mostního závěru XW1 do kapsy na závěrné zídce OP4. V zadávací dokumentaci byla tato doba předpokládána 2 měsíce (60 dnů). Z tohoto důvodu se prodlužuje lhůta dílčího termínu plnění pro SO 112 a SO 203 o 40 dnů.
c)	Dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 6. Z důvodu technologické a časové náročnosti provedení stabilizace podloží hlubinnými základovými prvky se prodlužuje lhůta dílčího termínu plnění pro SO 112 a SO 203 o 23 dnů.
Na základě uvedených skutečností a na základě koordinace se zhotovitelem nadřazené dopravní infrastruktury „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – 1. Etapa“ se strany dohodly na dokončení a předání dílčího díla (SO 112, SO 203 a SO 431) včetně vyklizení zařízení staveniště nejpozději do 30. 09. 2020 (vyjma části díla specifikovaném v bodu 1.2.4). 
1.2.4.	Realizace opravy křižovatky ul. Kvapilova a ul. Příborská, která je součásti stavebního objektu 112, bude na základě požadavku zhotovitele nadřazené dopravní infrastruktury „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – 1. Etapa“ realizována v průběhu roku 2021, a to ve lhůtě do 2 měsíců od písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatel zašle výzvu nejpozději do 30. 08. 2021. Přesný termín bude upřesněn v rámci průběžné koordinace obou staveb.

1.3.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	62 000 014,83 Kč bez DPH,
tj. 75 020 017,94 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	1 157 667,45 bez DPH,
tj. 1 400 777,61 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 3 547 350,84 Kč bez DPH,
tj. - 4 292 294,52  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	59 610 331,44 Kč bez DPH,
tj. 72 128 501,04 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	1 100 003,35 Kč bez DPH,
tj. 1 331 004,05 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 987 325,35 Kč bez DPH,
tj. - 1 194 663,67 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	59 723 009,44 Kč bez DPH,
tj. 72 264 841,42 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	452 113,20 Kč bez DPH,
tj. 547 056,97 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	 0,00 Kč bez DPH,
tj.  0,00 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 3	60 175 122,64 Kč bez DPH,
tj. 72 811 898,39 Kč vč. DPH	

1.4.	Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 3 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 6 hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje změnu hodnoty závazku oproti původně sjednané ceně díla o 6,63 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 2,79 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celková změna ceny díla ve smlouvě ve znění dodatků č. 1 až 3 činí -2,94 %.
Strany dále konstatují, že povaha změny dle změnového listu č. 5 je v souladu odst. 7 ust. § 222 ZZVZ, jelikož se jedná se o náhradu za kvalitativně stejné, resp. vyšší úroveň stavebních prací při zpracování díla na této části, oproti předpokládanému způsobu provedení dle projektové dokumentace a nemá vliv na výši ceny díla.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 48. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12. 05. 2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 3 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
- Příloha č. 2 – Změnové listy č. 5 a 6

Za objednatele:							Za zhotovitele:
-	na základě plné moci

Ve Frýdku-Místku                                                             	V Olomouci

_________________________					__________________________
RNDr. Michal Pobucký, DiS.					Ing. Klára Kalábová
primátor                                                                                         ekonom Oblasti Střed
                                                                                                      o.z. Morava

                                                                                                      __________________________
                                                                                                      Ing. Vítězslav Bujnoch  
                                                                                                      vedoucí OTÚ Oblasti Střed
                                                                                                      o.z. Morava