DODATEK č. 1
                                       KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0469/2020/IO 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                              xxxxxxxxx, vedoucí  IO
                                              tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxxxx

              xxxxxxxx, technik  IO
                                              tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxx
	   
              xxxxxxxxxx, technik  IO
                                              tel: xxxxxxxxx/ email:xxxxxxxxxx
		
-	dále jen objednatel

a

POSITOR stavební s.r.o.,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
zastoupena Mgr. Pavlem Malatinským, jednatelem, a Bc. Dominikem Folwarcznym, jednatelem
IČ: 068 83 184
DIČ: CZ06883184
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 73556
č. účtu: xxxxxxxx/xxxx
tel: xxxxxxx
fax:
e-mail: xxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „ZŠ a MŠ Skalice 192 – hydroizolace spodní stavby“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku

1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2020 na stavební práce pod názvem „ZŠ a MŠ Skalice 192 – hydroizolace spodní stavby“.

1.1	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v provedení injektážní clony ze silanové krémové injektáže do vrtů d 12mm po 100 mm a vyrovnání zdiva těsnící maltou a aplikace stěrkové izolace na negativní straně zdiva v místnosti č. 016. Dále provedení dozdívek  pro vytvoření rovné plochy před provedením hydroizolace anglických dvorků.

Dále se předmět plnění upravuje o neprováděné práce spočívající v nebourání části izolačních přizdívek, železobetonové desky a stávající konstrukce zadního schodiště. 

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1, 2 a 3, viz příloha č. 1, 2 a 3. 

1.2	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
 	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Původní cena díla	7 869 652,47 Kč	1 652 627,02 Kč	9 522 279,49 Kč	
Neprováděné stavební práce 
dle dodatku č. 1	-58 218,61 Kč	- 12 225,90 Kč	-70 444,51 Kč	
Dodatečné stavební  práce 
dle dodatku č. 1	83 004,40 Kč	17 430,92 Kč	100 435,32 Kč	
Celkové navýšení ceny 
dle dodatku č. 1	24 785,79 Kč	5 205,02 Kč	29 990,81 Kč	
Část A) 1., 2., 4. etapa	1 990 460,06 Kč	417 996,62 Kč	2 408 456,68 Kč	
Celková cena dle dodatku č. 1	7 894 438,26 Kč	1 657 832,04 Kč	9 552 270,30 Kč	

Součet veškerých dodatečných prací činí 1,05% původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 0,31%.

1.3	Přípustnost změn

Strany konstatují, že dodatečné práce a neprováděné práce naplňují režim přípustné změny závazku podle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projevily fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 57. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 1. 9. 2020. 
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání. 

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 3

Za objednatele:		      				Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku dne _________2020			V Ostravě dne _______2020

_____________________________		         __________________________
         RNDr. Michal Pobucký, DiS.	                                              Mgr. Pavel Malatinský
                  primátor                                                                         jednatel