DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx, technik  IO
tel: xxxxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, technik  IO
tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel

a

INTOZA s.r.o. 
se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky 
zastoupena: Tomášem Závadou, jednatelem 
IČ: 25873261 
DIČ: CZ25873261 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 23847 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: th2cmhn
zástupce ve věcech smluvních: 
Tomáš Závada, jednatel 
e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 
xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
tel:  xxxxxx / email xxxxxxxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“ následujícího znění a obsahu. 

ČLÁNEK 1
Předmět DODATKU
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0453/2020/IO ze dne 4. 8. 2020 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“, a to z důvodů, že finální povrchy interiérů – nábytků a finální vzhled dveří ve vestibulu, včetně určení materiálu pro výrobu těchto dveří, byly objednatelem odsouhlaseny až 19.10.2020, což činí 59 dnů ode dne předání staveniště a zhotovitel navrhl o posunutí termínu ukončení I. etapy, a to o 38 dnů. Z těchto důvodů se smlouva mění následovně:
1.1	Původní článek 3 Doba, místo plnění, bod 2 se v písmenu a) mění následovně: 
a)	I. etapa do 118 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 
2. Strany konstatují, že změna termínu dokončení I. etapy odpovídá ujednání:

a)	 článku 3 odst. 10 smlouvy, podle kterého je ujednáno, že Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany objednatele nebo překážek na straně objednatele v podobě zjištěných vad v projektové dokumentaci pro provedení stavby, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče rozpoznat, a které mají vliv na termín dokončení díla jako celku, a to o přiměřenou dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy a současně
b)	článku 4 odst. 6.2. smlouvy, dle něhož je dohodnuto, že Před samotným dodáním a zapracováním materiálů a výrobků budou zhotovitelem osobě TDS, případně autorskému dozoru předloženy veškeré potřebné doklady, zejména certifikáty, prohlášení o shodě, doplněné montážními listy a technologické postupy, na základě kterých bude možno odsouhlasit shodu nabízeného výrobku (technologie) s projektovou dokumentací. Dodávky na stavbu lze realizovat až po předchozím odsouhlasení se zástupcem objednatele.

3. Strany konstautují, že úprava termínu dokončení I. etapy odpovídá shora uvedeným ujednáním smlouvy, a proto se jedná o přípustnou změnu smlouvy dle § 222 ZZVZ. 

ČLÁNEK 2
  ZÁVĚREČNÁ ujednání

1.	Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3.	Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 61. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 10. 11. 2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 2 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku			V Ostravě 

_____________________________		__________________________
RNDr. Michal Pobucký, DiS.			Tomáš Závada 
Primátor		           jednatel