DODATEK č. 3
                                       KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0469/2020/IO 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek	
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                              xxxxxxxxx, vedoucí  IO
                                              tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxx

              xxxxxxxxxx, technik  IO
                                              tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

POSITOR stavební s.r.o.,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
zastoupena Mgr. Pavlem Malatinským, jednatelem, a Bc. Dominikem Folwarcznym, jednatelem
IČ: 068 83 184
DIČ: CZ06883184
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 73556
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxx
fax:
e-mail: xxxxxxxxxxxx 

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „ZŠ a MŠ Skalice 192 – hydroizolace spodní stavby“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku

1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2020 na stavební práce pod názvem „ZŠ a MŠ Skalice 192 – hydroizolace spodní stavby“ (dále jen smlouva).

1.1	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce v rozsahu 1. – 4. etapy 
spočívající v:
-	neprovedení opravy venkovních schodišť,
-	neprovedení opravy obrubníků
-	neprovedení ukončovací lišty nopové folie
-	neprovedení prodloužení zahradního ventilu a osazení venkovní vpusti pod ventilem.
Tyto práce mají přímou vazbu na práce provádění v 5. etapě, na které objednatel uplatňuje výhradu. Podrobný popis změn je uveden ve změnovém list č. 7 viz příloha č. 1. 

1.2	Shora označené méněpráce mají přímou vazbu na sjednané práce v rozsahu 5. etapě, avšak objednatel uplatnil výhradu sjednanou ve smlouvě a v zadávacích podmínkách tyto práce neprovádět, a proto strany ukončují smlouvu o dílo dokončení 1. – 4. etapy.

1.3	Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 1.2. se mění, upravuje a doplňuje následovně:
Termín dokončení díla v rámci 3. a 4. etapy se ujednává na 124 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (oproti původně sjednanému termínu 120 dnů) z důvodů objednatelem avizované výhrady k ukončení předmětu plnění smlouvy v rámci dokončovacích prací 1. – 4. etapy, kdy bylo nutno vymezit a zúčtovat veškeré stavební práce (vícepráce i méněpráce), které přímo souvisí s navazující neprováděnou pátou etapu tak, aby dílo bylo funkční jako dokončený celek způsobilý k užívání. 
   
1.4	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:
 	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH	
Původní cena díla	7 869 652,47 Kč	1 652 627,02 Kč	9 522 279,49 Kč	
Celková cena dle dodatku č. 1	   7 894 438,26 Kč	  1 657 832,04 Kč	  9 552 270,30 Kč	
Celková cena dle dodatku č. 2	8 127 456,20 Kč	1 706 765,80 Kč	9 834 222,00 Kč	
Cena části A) 1., 2., 4. etapa dle Dodatku č.2 	2 201 868,22 Kč	462 392,33 Kč	2 664 260,55 Kč	
Cena neprováděných prací v části A) 1., 2., 4., 	-106 943,70 Kč	-22 458,18	-129 401,88 Kč	
Cena neprováděných prací v části A) 5. etapa na základě uplatnění výhrady objednatele v zadávacích podmínkách a ve smlouvě dle Dodatku č. 3	- 3 878 451,90 Kč	- 814 474,90 Kč	- 4 692 926,80 Kč	
Cena neprováděných prací v části C) 5. etapa na základě uplatnění výhrady objednatele v zadávacích podmínkách a ve smlouvě dle Dodatku č. 3	  - 290.487,00 Kč	      - 61.002,27 Kč	    - 351.489,27 Kč	
Cena Části A) 1., 2., 4. etapa dle dodatku č. 3	2 094 924,52 Kč	439 934,15 Kč	2 534 858,67 Kč	
Celková cena dle dodatku č. 3	3 851 573,60 Kč	808 830,45 Kč	4 660 404,05 Kč	

Součet veškerých dodatečných prací činí 4,21% původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 1,92%.

1.5	Přípustnost změn

Strany konstatují, že neprováděné práce naplňují režim přípustné změny závazku podle § 222 odst. 2  ve spojení s ust. § 100 odst. odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o uplatnění výhrady objednatele dle zadávacích podmínek, které učinil součástí smlouvy o dílo dle ujednání článku 2 odst. 3 smlouvy.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 71. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 23. 2. 2021. 
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání. 

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 7

Za objednatele:		      				Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku dne _________2021			V Ostravě dne _______2021

_____________________________		         __________________________
         RNDr. Michal Pobucký, DiS.	                                              Mgr. Pavel Malatinský
                  primátor                                                                         jednatel