DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO č. S/0453/2020/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem:				 	Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 			Petr Korč, primátor
IČ:  						00296643
DIČ: 						CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: 			xxxxxxx/ xxxxxx
ID datové schránky: 				w4wbu9s
tel.:						558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxxxx – vedoucí investičního odboru
	tel. xxxxxxxx/email: xxxxxxxxx
		xxxxxxxxx, technik  IO
                                     	           tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxx
       	xxxxxxxxxx, technik  IO
                                     	           tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel
a

INTOZA s.r.o. 
se sídlem: 				Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky 
zastoupena: 				Tomášem Závadou, jednatelem 
IČ: 					25873261 
DIČ: 					CZ25873261 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 23847 
bankovní spojení/číslo účtu: 		xxxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: 			th2cmhn
zástupce ve věcech smluvních: 	Tomáš Závada, jednatel 
e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 	xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
					tel:  xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“ následujícího znění a obsahu. 

ČLÁNEK 1
Předmět DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy    
    o dílo č. S/0453/2020/IO ze dne 4. 8. 2020 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“:

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce spočívající ve:
-	změně mobiliáře
-	doplnění prací zdravotechnických instalací pro stávající rozvody
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 05, viz příloha č. 1 dodatku č. 7.

1.3. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 7 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH 21 %	Cena vč. DPH v CZK	
 Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	7 860 000,00	1 650 600,00	9 510 600,00	
 Neprováděné stavební práce 
 dle dodatku č. 3	 - 84 103,92	    65 547,15	   - 101 765,74	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 3	 396 233,22	    83 208,98	     479 442,20	
 Celkové navýšení ceny dle    
 dodatku č. 3	 312 129,30	    65 547,15	     377 676,45	
Celková cena dle dodatku č. 3	8 172 129,30	1 716 147,15	9 888 276,45	
Neprováděné stavební práce 
dle dodatku č. 4	-371 221,96	-77 956,61 	-449 178,57 	
Dodatečné stavební práce 
dle dodatku č. 4	444 008,73	93 241,83 	537 250,56	
 Celková cena dle dodatku č. 4	8 244 916,07	1 731 432,37	9 976 348,44 	
Neprováděné práce 
dle dodatku č. 5 	-217 920,00	-45 763,20 	-263 683,20  	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 5	225 807,33 	47 419,54	273 226,87	
Cena díla dle dodatku č. 5	8 252 803,40	1 733 088,71	9 985 892,11 	
Neprováděné práce 
dle dodatku č. 6 	-89 593,16	-18 814,56	-108 407,72	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 6	408 263,03	85 735,24	493 998,27	
Cena díla dle dodatku č. 6	8 571 473,27	1 800 009,37	10 371 482,66	
Neprováděné práce 
dle dodatku č. 7	-322 549,45 Kč	-67 735,39 Kč	-390 284,84 Kč	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 7	491 614,51 Kč	103 239,05 Kč	594 853,56 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 7	8 740 538,33 Kč	1 835 513,05 Kč	10 576 051,38 Kč	

1.4. Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázky, a to:
1)	dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem a neprováděné stavební práce dle změnového listu č. 05 naplňují přípustnou změnu deminimis ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když hodnota změny závazku v důsledku veškerých dodatečných a neprováděných prací činí 12,71 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla.
2)	dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem a neprováděné stavební práce dle změnového listu č. 05 naplňují přípustnou změnu deminimis ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když hodnota změny závazku v důsledku veškerých dodatečných a neprováděných prací činí 15,73 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 50 % oproti původní sjednané ceně díla.
3)	Součet dodatečných a neprováděných prací po započtení neprováděných prací sjednaných v dodatku č. 7 smlouvy představuje navýšení o 11,2 % oproti původní celkové ceně dle smlouvy.
ČLÁNEK 2
  ZÁVĚREČNÁ ujednání
1.	Tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3.	Tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 87. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 21.09.2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 7 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 7 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
Za objednatele:	                                 Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku		V Ostravě 

_____________________________		__________________________
Petr Korč		Tomáš Závada 
primátor		jednatel

Příloha:
1.	Změnový list č. 05 včetně příloh
2.	Rekapitulace dosud provedených změn dle § 222 ZZVZ