Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S/0388/2022/IO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx
tel: xxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxx

                                           xxxxxxx, technik IO,  
                                           tel: xxxxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a

Hromoelektro s.r.o. 
se sídlem U Statku 92/1, 747 14 Ludgeřovice
zastoupena Tomášem Selzerem, jednatelem společnosti
IČ: 04507193
DIČ: CZ0407193
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 63873  
č. účtu: xxxxxxxx/xxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx
fax: ----
e-mail: xxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0388/2022/IO ze dne 31.05.2022 k veřejné zakázce „Radniční 13 – dodávka a montáž hromosvodu“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0388/2022/IO ze dne 31.05.2022 1 k veřejné zakázce „Radniční 13 – dodávka a montáž hromosvodu“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 1, který obnáší barevné sjednocení vodiče s fasádou, změnu vedení vodiče ze středové části a rozebrání a zpětné uložení dlažby do betonového lože. Další dle podrobností popsaných ve změnovém listu.

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH	
Dokumentace ochrany před bleskem	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč	
Realizace díla, vč. revizní zprávy	450 000,00 Kč	94 500,00 Kč	544 500,00 Kč	
Cena celkem	475 000,00 Kč	99 750,00 Kč	574 750,00 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	49 850,00 Kč	10 468,50 Kč	60 318,50 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 1	524 850,00 Kč	110 218,50 Kč	635 068,50 Kč	

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 19.07.2022.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Příloha:
Změnový list č. 1

    Za objednatele:			Za zhotovitele:

    Ve Frýdku-Místku			V Ludgeřovicích

  _____________________________			__________________________
       Petr Korč	                                                       Tomáš Selzer                                        	          
       primátor                                                                    jednatel