Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. S/0249/2022/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

                                           xxxxxxxxxx -  technik investičního odboru 
                                           tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

S-O-D Holding s.r.o. 
se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné 
zastoupena Františkem Doležalem, jednatelem
IČ: 26830272 
DIČ: CZ26830272 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 40026
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxx/xx
ID datové schránky: np7chk8
zástupce ve věcech smluvních: František Doležal, jednatel
		
zástupce ve věcech technických: xxxxxxx
   Tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy 
o dílo č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se nerozšiřuje, jedná se pouze o záměnu položek soupisu stavebních prací týkající se záměny výplně balkónových zábradlí. 
Podrobný popis změny je uveden ve změnovém listu č. 1 viz příloha č. 2 dodatku. 

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč	

Cena dle SoD 
	24 555 333,00	3 683 299,95	28 238 632,95	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	1 562 000,00	234 300,00	1 796 300,00	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 	-1 562 000,00	-234 300,00	-1 796 300,00	
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	24 555 333,00	3 683 299,95	28 238 632,95	

1.3.	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to: 
Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnového listu č. 1 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu položek soupisu stavebních prací (záměna výplní balkónových zábradlí), které jsou kvalitativně srovnatelné a cenově stejné ve vztahu k nahrazovaným pracím. 

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, 
je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz

5.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

6.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 19.07.2022.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
příloha č. 2 – Změnový list č. 1

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                   V Petřvaldu

_________________________			__________________________
Petr Korč						František Doležal
primátor                                                               jednatel