Dodatek č. 3
smlouvy o dílo č. S/0249/2022/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx – xxxxxxxx
tel: xxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

                                           xxxxxxxxxx -  technik investičního odboru 
                                           tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

S-O-D Holding s.r.o. 
se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné 
zastoupena Františkem Doležalem, jednatelem
IČ: 26830272 
DIČ: CZ26830272 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 40026
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxxxxx
ID datové schránky: np7chk8
zástupce ve věcech smluvních: František Doležal, jednatel
		
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxx
   Tel: xxxxx / email: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy 
o dílo č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č. 3 a 4, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr pro
a)	dodatečné práce	
-  úprava podhledu nad vstupem
- atika strojovny výtahu
- hydrantová dvířka
b) neprováděné práce
- budky pro rorýsy a netopýry
- vývody VZT na fasádu v 1. NP
- dřevěná konstrukce pod balkony
- zmenšení rozsahu záchytného systému na střeše strojovny výtahu.
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 3 a 4 - viz příloha č. 1 dodatku. 

1.2.  Původní článek 3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ se upravuje v bodě 1. následně:
1.	Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a dokončené dílo předat objednateli do 151 kalendářních dnů od předání 
a převzetí staveniště., kdy původní lhůta 120 kalendářních dnů se prodlužuje:
a)	o 7 dnů z důvodu nezbytných dodatečných prací, které jsou předmětem změnového listu č. 3, v souladu s čl. 3 odst. 4 smlouvy o dílo, kdy lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla za strany objednatele; 
b) o 24 dnů (v období od 1.7.2022 do 28.10.2022) z důvodu přerušení prací kvůli překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které bránily provádění prací technologickými postupy anebo v souladu s příslušnými technickými normami, v souladu s ust. čl. 3 odst. 2 smlouvy o dílo. Nepříznivé klimatické podmínky v podobě srážek a větru jsou doloženy výpisy ČHMÚ.

1.3.  Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč	

Cena dle SoD
	24 555 333,00	3 683 299,95	28 238 632,95	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	1 562 000,00	234 300,00	1 796 300,00	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	-1 562 000,00	-234 300,00	-1 796 300,00	
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	24 555 333,00	3 683 299,95	28 238 632,95	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	76 100,00	11 415,00	87 515,00	
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem	24 631 433,00	3 694 714,95	28 326 147,95	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	86 874,31	13 031,15	99 905,46	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	-21 521,24	-3 228,19	-24 749,43	
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 3 celkem	65 353,07	9 802,96	75 156,03	
Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem	24 696 786,07	3 704 517,91	28 401 303,98	

1.3.	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím že dle dodatku č. 3 naplňují:
a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ* v rozsahu změnového listu ZL č. 3 a ZL č. 4 d), když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 0,37 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 0,33 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

b)	dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového listu č. 4 b) a c), kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných neprováděných prací činí 0,06 %, v součtu dřívějších změn činí 0,37%, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla,  

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
na stavební práce, která není koncesí.

c) dílem režim přípustné změny dle § 222 odst. 2 ZZVZ, a to v rozsahu dle změnového listu č. 4 a), kdy se hodnota změn nesleduje. Jedná se o vyhrazené změny závazku sjednané ve smlouvě na základě zadávacích podmínek dle § 100 odst. 1.
Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 0,58 %.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz

5.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

6.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 4. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22.11.2022.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 3 a 4
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                   V Petřvaldu

_________________________			__________________________
Petr Korč						František Doležal
primátor                                                               jednatel