Dodatek č. 4
smlouvy o dílo č. S/0249/2022/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx – xxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

                                           xxxxxxxxxx -  technik investičního odboru 
                                           tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

S-O-D Holding s.r.o. 
se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné 
zastoupena Františkem Doležalem, jednatelem
IČ: 26830272 
DIČ: CZ26830272 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 40026
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxxxx
ID datové schránky: np7chk8
zástupce ve věcech smluvních: František Doležal, jednatel
		
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxx
   Tel: xxxxx / email: xxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689“ následujícího znění a obsahu (dále také jen smlouva a  dodatek).

1.	Předmět dodatku

1.	Strany uzavírají dodatek s vědomím následujících skutečností:

-	Při realizaci díla došlo k prodloužení termínu na dokončení stavebních prací jednak v souladu s ujednáními v článku 3 smlouvy, což je stranami zohledněno naposledy Dodatkem č. 3 smlouvy s termínem dokončení do 28. 11 2022;
-	Vzhledem k nastávajícímu zimnímu období a stavu rozpracovanosti stavby lze předpokládat při obvyklém průběhu zimy, že bude nezbytné stavební práce přerušit do doby s odpovídajícími klimatickými podmínkami.

2.	Vzhledem ke skutečnostem dle odst. 1 tohoto dodatku, tj. k očekávanému přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a vzhledem k nezbytnému zajištění bezpečnosti třetích osob v okolí stavby po dobu tohoto případného přerušení, zhotovitel utvrzuje svůj závazek ze smlouvy dílo dokončit (jinak ze smlouvy o dílo pojmově pro něj vyplývající) – tj. mimo jiné zejména uznává a potvrzuje, že na své náklady a nebezpečí dílo dokončí v rozsahu jeho doposud nedokončené části, tzn., 
že jako nositel nebezpečí škody na věci až do řádného dokončení díla mimo jiné zejména:
a)	ponechá z důvodu zajištění bezpečnosti po celou dobu přerušení prací až do doby osazení zábradlí na balkonech jednotlivých bytů lešení postavené kolem těchto částí fasády v plném rozsahu;
b)	zabezpečí staveniště (stavbu)/rozpracované stavební práce) tak, aby v průběhu případného přerušení prací nebyly působením nepříznivých klimatických podmínek dosud provedené práce poškozeny či nepodlehly degradaci a bude na nich možné 
bez dalších opatření pokračovat při zlepšení klimatických podmínek.

3.	Objednatel shora uvedené utvrzení zhotovitele akceptuje doposud jako dostačující.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, 
že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny 
na stránkách www.frydekmistek.cz

5.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

6.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 5. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 13. 12. 2022.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku					V Petřvaldu

_________________________			__________________________
Petr Korč						František Doležal
primátor						jednatel