Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S/0353/2020/IO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 	Petr Korč, primátor
IČ:  				00296643
DIČ: 				CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: 		w4wbu9s
tel.: 				558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – xxxxxxxx
tel: xxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx
tel: xxxxxxx, xxxxx

-	dále jen objednatel 
 
a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha
zastoupena Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti na základě plné moci
IČ: 				06943187
DIČ: 				CZ06943187
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C
vložka 291808
č. účtu: 			xxxxxxxx/xxxxxx
tel: 				xxxxxxxxxx
e-mail: 				xxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č. 1, č. 4, č. 8 – II.“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 

článek 1
PŘEDMĚT DODATKU
1.	Smlouva o dílo č. S/0353/2020/IO (dále jen smlouva) byla uzavřena za účelem zpracování komplexní projektové dokumentace pro Revitalizaci sídliště Riviéra – lokalita č. 1, č. 4, č. 8 ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výkon autorského dozoru (AD).
2.	Vzhledem ke skutečnosti, že:
a)	Objednatel má záměr předmět díla rozšířit o zapracování sítě cyklostezek v řešeném území, přičemž se jedná o podstatné rozšíření předmětu plnění oproti původnímu rozsahu plnění,
b)	na základě ujednání v článku 9 smlouvy si objednatel vyhradil právo odstoupit od smlouvy po ukončení toho kterého stupně projektování,
ukončují strany smlouvu o dílo vzájemnou dohodou a vypořádávají vzájemné nároky z doposud provedených prací a služeb.

článek 2
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ
1.	Zhotovitel ke dni uzavření tohoto dodatku zpracoval a dokončil tuto část předmětu smlouvy:
a)	lokalita č. 1
-	Polohopisné a výškopisné zaměření (dokončeno 100 % objemu prací)
-	Hydrogeologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
-	Dendrologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
-	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti (dokončeno 50 % objemu prací)

b)	lokalita č. 4
-	Polohopisné a výškopisné zaměření (dokončeno 100 % objemu prací)
-	Hydrogeologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
-	Dendrologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
-	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti (dokončeno 50 % objemu prací)

c)	lokalita č. 8
-	Polohopisné a výškopisné zaměření (dokončeno 100 % objemu prací)
-	Hydrogeologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
-	Dendrologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
-	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti (dokončeno 50 % objemu prací).
2.	Objednatel přijímá doposud provedené plnění zhotovitelem ke dni 18.04.2023 ve finančním rozsahu:
a)	lokalita č. 1 – 63 500,- Kč bez DPH, 76 835,- Kč vč. DPH
b)	lokalita č. 4 – 70 500,- Kč bez DPH, 85 305,- Kč vč. DPH
c)	lokalita č. 8 – 63 450,- Kč bez DPH, 76 774,50 Kč vč. DPH.
Celkem za všechny lokality: 197 450,- Kč bez DPH, 238 914,50 Kč vč. DPH.

3.	Smluvní strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku a uhrazením ceny v celkové výši 238 914,50 Kč vč. DPH jsou vypořádány veškeré vzájemné závazky ze smlouvy o dílo.
4.	Úhrada výše dohodnuté ceny bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se splatností 14 dnů od doručení.

článek 3
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.	Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2.	Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 12. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 18.04.2023. 
3.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:		Za zhotovitele:

V ______________, dne __________		V _____________ dne___________ 

_____________________________		____________________________
Petr Korč 		Ing. Petr Vašina
primátor		ředitel společnosti, na základě plné moci