Dodatek č. 5
smlouvy o dílo č. S/0249/2022/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxx

                                           xxxxxxx -  xxxxxxx 
                                           tel: xxxxxxx / email: xxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

S-O-D Holding s.r.o. 
se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné 
zastoupena Františkem Doležalem, jednatelem
IČ: 26830272 
DIČ: CZ26830272 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 40026
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxxxxx
ID datové schránky: np7chk8
zástupce ve věcech smluvních: František Doležal, jednatel
		
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxx
   Tel: xxxxxx / email: xxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy 
o dílo č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689“.

1.1.  Původní článek 3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ se upravuje v bodě 1. následně:
1.	Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a dokončené dílo předat objednateli do 261 kalendářních dnů od předání 
a převzetí staveniště., kdy původní lhůta 151 kalendářních dnů se prodlužuje:
a) o 110 dnů (za období od 29.10.2022 do 13.03.2023) z důvodu přerušení prací kvůli překážkám v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které bránily provádění prací technologickými postupy anebo v souladu s příslušnými technickými normami, v souladu s ust. čl. 3 odst. 2 smlouvy o dílo. Nepříznivé klimatické podmínky v podobě srážek, větru a teploty jsou doloženy výpisy ČHMÚ. 

2. Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz

5.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

6.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 15. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 23.05.2023.

Přílohy:
1.	Přehled klimaticky nepříznivých dnů
2a. Výpisy ČHMÚ
2b. Výpisy ČHMÚ

Za objednatele:			Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku                                                           	V Petřvaldu

________________________			__________________________
Petr Korč			                     František Doležal
primátor                                                    jednatel