DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0488/2023/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
 xxxxxxxxx, xxxxxx,     
 e-mail: xxxxxxx , tel: xxxxxxx
 xxxxxx, xxxxxxxx
 e-mail: xxxxxxx,  tel: xxxxxxx
-	dále jen objednatel 
a

TŘINECKÁ PROJEKCE a.s.
se sídlem Míru 274, 739 61 Třinec
zastoupena Ing. Josefem Waclawkem, předsedou představenstva
	      Ing. Stanislavem Smigaou, členem představenstva
IČ: 47677741
DIČ: CZ47677741
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B, vložka 896
číslo účtu: xxxxxxx/xxxxxx
tel. xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0488/2023/IO ze dne 01.08.2023 k veřejné zakázce „Zpracování PD – Rekonstrukce elektroinstalace – budova H, jesle FM – III.“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0488/2023/IO ze dne 01.08.2023 k veřejné zakázce „Zpracování PD – Rekonstrukce elektroinstalace – budova H, jesle FM - III“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v části zabezpečovací zařízení, které bylo v předpokladu napojeno na stávající ústřednu. Po fyzické kontrole zhotovitele a následné komunikaci s provozovatelem je nutné rozšíření díla o navržení další podružné ústředny s napojením nových čidel a zpracování projektové dokumentace v části propojení, nových schémat a s tím spojených úkonů.
V této věci se uskutečnilo několik konzultací.

1.2     Původní článek 4. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	135 500,00 Kč	28 455,00 Kč	163 955,00 Kč	
Dodatečné práce na DPS dle dodatku č. 1	24 000,00 Kč	5 040,00 Kč	29 040,00 Kč	
Cena dle dodatku č. 1	159 500,00 Kč	33 495,00 Kč	192 995,00 Kč	

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 27. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 24.10.2023.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Příloha:
Cenová nabídka ze dne 11.10.2023

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                              V Třinci

_______________________		                                 _____________________        
Petr Korč                                                                          Ing.Josef Waclawek	
primátor                                                                           předseda představenstva

								____________________
								Ing. Stanislav Smiga
								člen představenstva