Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. S/0298/2024/IO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 

Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem 
IČ: 00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
                                                       xxxxxxxxx – xxxxxxx 
                                                       tel: xxxxxx / email: xxxxxxx
                                                       xxxxx – xxxxxx
                                              tel: xxxxx / email: xxxxxx

-	dále jen objednatel
a

BYSTROŇ Group a.s. 
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava 
zastoupena: Michalem Bystroňem, členem představenstva
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka
3238
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxx/xxxxxxx
ID datové schránky: z5dc98r
zástupce ve věcech smluvních: xxxxxx, xxxxxx
zástupce ve věcech technických: xxxxxxx
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. S/0298/2024/IO ze dne 18. 04. 2024 k veřejné zakázce „ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0298/2024/IO ze dne 18. 04. 2024 k veřejné zakázce „ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr.
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06 viz příloha č. 1 tohoto Dodatku. 

1.2	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč	

Původní cena díla
	36 477 000,00	7 660 170,00	44 137 170,00	
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	2 269 260,04	476 544,61	2 745 804,65	
Neprováděné stavební práce dle Dodatku č. 1	- 690 276,17	- 144 958,00	- 835 234,17	
Celkové zvýšení ceny díla dle Dodatku č. 1	1 578 983,87	331 586,61	1 910 570,48	
Cena díla dle Dodatku 
č. 1	38 055 983,87	7 991 756,61	46 047 740,48	

1.3	Přípustnost změn

Investiční odbor provedl věcně rozdělení dodatečných a neprováděných prací dle pravidel § 222 ZZVZ. Dle Dodatku č. 1 naplňují:

a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ* v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle části předloženého změnového listu č. 05, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 0,94 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla.

* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

b)	a dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9 ** v rozsahu předložených změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 06 a části změnového listu č. 05, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 

** § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
§ 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

Přípustnost veškerých dodatečných a neprováděných prací dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5, 6 a 9 ZZVZ činí 5,27 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle Dodatku č. 1 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 4,33 %.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 52. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 17. 09. 2024.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

    Za objednatele:		                                 Za zhotovitele:

    _________________________		           __________________________
    Petr Korč		                                           Michal Bystroň
    primátor                                                           člen představenstva