Dodatek č. 5
smlouvy o dílo č. S/0298/2024/IO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 

Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem 
IČ: 00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/ xxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
                                                       xxxxxx – xxxxxxxx 
                                                       tel: xxx / email: xxxxxx
                                                       xxxxxx – xxxxxxx
                                              tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxx

-	dále jen objednatel
a

BYSTROŇ Group a.s. 
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava 
zastoupena: Michalem Bystroňem, členem představenstva
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka
3238
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx, č. účtu xxxxxx/xx
ID datové schránky: z5dc98r
zástupce ve věcech smluvních: Pavel Konečný, výkonný ředitel
zástupce ve věcech technických: xxxxx
tel: xxxxxx / email: xxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo 
č. S/0298/2024/IO ze dne 18. 04. 2024 k veřejné zakázce „ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

1.	Předmětem dodatku je narovnání zjištěných rozdílů cen, které vycházejí z chybně spočtených položek ve ZL č. 31 a ZL č. 35, které byly součástí Dodatku č. 4.

2.	Smluvní strany konstatují zjištění, že v daných změnových listech byly nesprávně provedeny součty položek, a to:

a)	ve změnovém listu č. 31. kde se jednalo o chybné součiny některých položek.
b)	ve změnovém listu č. 35, kde se jednalo o chybný součet oddílu, kdy v jednom oddílu byl zahrnutý i součet z jiného oddílu. 

Změnový list č. 31 – Změna vytápění v MŠ
Ve změnovém listu č. 31 došlo k chybnému součinu jednotlivých položek, kdy při součinu jednotkové ceny a množství byla spočtena chybná celková cena.

Původní chybné položky ve změnovém listu č. 31:
611131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně   
	m2
	29,800
	97,20
	2 324,40
	
611142001
	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu   
	m2
	29,800
	347,00
	9 536,00
	
611311131
	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm   
	m2
	29,800
	244,00
	6 675,20
	
612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   
	m2
	55,700
	75,30
	3 342,00
	
612142001
	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu   
	m2
	55,700
	296,00
	14 482,00
	
612311131
	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm   
	m2
	55,700
	193,00
	10 026,00
	
                                                 Součet chybných položek	46 385,60	

Ve smyslu narovnání ceny díla byly součiny jednotlivých položek přepočteny a opraveny:
611131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně   
	m2
	29,800
	97,20
	2 896,56
	
611142001
	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu   
	m2
	29,800
	347,00
	10 340,60
	
611311131
	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm   
	m2
	29,800
	244,00
	7 271,20
	
612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   
	m2
	55,700
	75,30
	4 194,21
	
612142001
	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu   
	m2
	55,700
	296,00
	16 487,20
	
612311131
	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm   
	m2
	55,700
	193,00
	10 750,10
	
                                                 Součet přepočtených a opravených položek	51 939,87	

Narovnání ceny díla dle změnového listu č. 31 činí + 5 554,27 Kč bez DPH.  

Změnový list č. 35 – Změna vytápění v MŠ
Ve změnovém listu č. 35 došlo k chybnému součtu oddílu, kdy oddíl č 63 v sobě obsahoval i součet oddílu č. 713.

Původní chybné položky ve změnovém listu č. 35:
63
	Podlahy a podlahové konstrukce	186 911,14
	
632451234.TBM
	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25, tl.přes 45 do 50 mm
	m2
	157,00000
	487,82
	76 587,74
	
632451292.TBM
	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl. přes 50 mm
	m2
	628,00000
	42,05
	26 407,40
	
713
	Izolace tepelné
	41 958,00
	
713121111R00
	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá
	m2
	140,00000
	50,00
	7 000,00
	
28372310
	deska EPS100 pro konstrukce s běžným zatížením tl. 100 mm
	m2
	154,00000
	227,00
	34 958,00

Správný výpočet položek změnového listu č. 35:
63
	Podlahy a podlahové konstrukce	102 995,14
	
632451234.TBM
	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25, tl.přes 45 do 50 mm
	m2
	157,00000
	487,82
	76 587,74
	
632451292.TBM
	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl. přes 50 mm
	m2
	628,00000
	42,05
	26 407,40
	
713
	Izolace tepelné
	41 958,00
	
713121111R00
	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá
	m2
	140,00000
	50,00
	7 000,00
	
28372310
	deska EPS100 pro konstrukce s běžným zatížením tl. 100 mm
	m2
	154,00000
	227,00
	34 958,00

Narovnání ceny díla dle změnového listu č. 35 činí   - 83 916,00 Kč bez DPH.  

Celkové snížení ceny díla tedy činí   - 78 361,73 Kč bez DPH.  

3.	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč	

Původní cena díla
	36 477 000,00	7 660 170,00	44 137 170,00	
Cena díla dle Dodatku 
č. 1	38 055 983,87	7 991 756,61	46 047 740,48	
Cena díla dle Dodatku 
č. 2	40 803 524,68	8 568 740,18	49 372 264,86	
Cena díla dle Dodatku 
č. 3	45 321 068,61	9 517 424,41	54 838 493,02	
Cena díla dle Dodatku 
č. 4	49 124 393,16	10 316 122,57	59 440 515,73	
Narovnání ceny díla dle ZL č. 31	5 554,27	1 166,40	6 720,67	
Narovnání ceny díla dle ZL č. 35	- 83 916,00	- 17 622,36	- 101 538,36	
Celkové narovnání ceny díla dle Dodatku č. 5	- 78 361,73	- 16 455,96	- 94 817,69	
Cena díla dle Dodatku 
č. 5	49 046 031,43	10 299 666,61	59 345 698,04	

4.	Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo nedochází k žádným změnám, které by podléhaly aplikaci ustanovení § 222 ZZVZ, neboť z povahy věci Dodatek č. 5 řeší opravu součtu vybraných položek stavebních prací provedených dle smlouvy o dílo, resp. provedených v režimu přípustných změn závazku dle § 222 ZZVZ podle Dodatku č. 4.  

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 79. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 01. 08. 2025.

    Za objednatele:		                                Za zhotovitele:

    _________________________		           __________________________
    Petr Korč		                                           Michal Bystroň
    primátor                                                           člen představenstva