Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. S/0572/2025/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČO: 00296643
statutární město Frýdek-Místek je osobou povinnou k dani
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxx/ xxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx
tel: xxxxxx / e-mail: xxxxxx

                                           xxxxxxxx, xxxxxxxxx, 
                                           tel: xxxxxxxx/ e-mail: xxxxxx
                                           
-	dále jen objednatel

a

Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o. 
se sídlem Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena Milanem Žižkou, jednatelem
IČO: 25850261
DIČ: CZ25850261
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C vložka 21659  
č. účtu: xxxxxxx/xxxxxxxx
tel: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavírají tento dodatek č.2 k veřejné zakázce „Penzion pro seniory, Lískovecká 86 – demontáž, dodávka a montáž osobních a nákladních výtahů“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.	Předmět dodatku

1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0572/2025/IO ze dne 7.7.2025 k veřejné zakázce „Penzion pro seniory, Lískovecká 86 – demontáž, dodávka a montáž osobních a nákladních výtahů“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce a neprováděné práce v rozsahu změnového listu               č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.

1.2.	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	5.958.356,00 Kč	732.102,72 Kč	6.690.458,72 Kč	
Cena dle dodatku č. 1 SoD	5.958.356,00 Kč	732.102,72 Kč	6.690.458,72 Kč	
Dodatečné práce
dle dodatku č. 2	96.800,00 Kč	11.616,00 Kč	108.416,00 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	-100.000,00 Kč	-12.000,00 Kč	-112.000,00 Kč	
Celkové snížení ceny dle dodatku č. 2	-3.200,00 Kč	-384,00 Kč	-3.584,00 Kč	
Cena dle dodatku č. 2	5.955.156,00 Kč	731.718,72	6.686.874,72 Kč	

1.3.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny závazku dle dodatku č. 2 v podobě dodatečných a neprováděných dodávek a prací naplňují režim přípustné změny podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ* v rozsahu změnového listu č. 1, když tyto změny nemění celkovou povahu zakázky a současně hodnota veškerých změn dle dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3,3 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 10 % oproti původní sjednané ceně díla. 

*Podle § 222 odst. 4 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo
 Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

2. Závěrečná ujednání
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení            § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 

3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 94. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27. 1. 2026.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.
           
5.	Přílohy tohoto Dodatku tvoří:

-	Změnový list č. 1, včetně oceněného soupisu neprováděných dodávek a dodatečných dodávek a souvisejících prací a rekapitulace přípustných změn

Za objednatele:			          Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku			          Ve Frýdku-Místku

________________________			__________________________
Petr Korč	                                                       Milan Žižka                                  	          
primátor                                                                 jednatel