DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek,  Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx, vedoucí IO, xxxxxxxxxxxxx /xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxxxxxx /xxxxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel nebo město 
   
a

Ing. arch. Martin Cviček
se sídlem Nové Dvory – Vršavec 2522, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 73762903
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení/číslo: xxxxxxxxxxxxxx
Tel: +420xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu – architektonická studie“ následujícího znění a obsahu: 
I.
Předmět dodatku č. 1

1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, dolnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy 
o dílo č. S/0357/2018/IO ze dne 11.6.2018 na poskytnutí služeb s názvem „Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu – architektonická studie“.

1.1.	Původní článek  2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se rozšiřuje o tyto dodatečné služby:
Zpracování nové (další) varianty architektonické studie, která bude projednána a odsouhlasena s objednatelem. Součástí nové varianty je i odhad cenových nákladů. Tato nová varianta bude zpracovaná ve stejném rozsahu jak finální varianta dle čl. 2 odst. 2  

1.2.	Původní článek 4. Doba, místo a další podmínky plnění, odst. 2. se upravuje takto:

 	Studie bude dokončena a předána nejpozději do 25.3.2019

1.3.	Původní článek 5. Cena a platební podmínky, odst. 3. se upravuje takto:

Cena plnění je členěna následovně:
	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
2 pracovní varianty studie	95.000,- Kč	-,- Kč	-,- Kč	
finální varianta studie	45.000,- Kč	-,- Kč	-,- Kč	
Projednání možného majetkového vypořádání s dotčenými vlastníky pozemků	20.000,- Kč	-,- Kč	-,- Kč	
Zpracování nové varianty studie dle dodatku č. 1	        16.000,- Kč	-,- Kč	-,- Kč	
Cena CELKEM	176.000,- Kč	-,- Kč	-,- Kč	

II.
Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.
4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 9. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.2.2019

Za objednatele:					Za zhotovitele:
           Ve Frýdku-Místku, dne 			Ve Frýdku-Místku, dne

_____________________________			__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor			Ing. arch. Martin Cviček