Název veřejné zakázky: Zpracování PD – 6. ZŠ F-M, Pionýrů 400 – přístavba tělocvičny
Číslo veřejné zakázky: P19V00000037                                                                                         

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0347/2019/IO 

smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor
IČ:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
bankovn spojení/číslo účtu: xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx, vedoucí IO, xxxxxxxxxxz /xxxxxxxxx
xxxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxx/xxxxxxxx

•	dále jen objednatel 
 a

MR Design CZ, s.r.o. 
se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, 708 00 Ostrava
zastoupena Ing. Romanem Diehelem, jednatelem
IČ: 25388606
DIČ: CZ25388606
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 17740  
č. účtu:xxxxxxxxxxxx; č.ú: xxxxxxxxx
tel: xxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – 6. ZŠ F-M, Pionýrů 400 – přístavba tělocvičny“ následujícího znění a obsahu:

I.
Předmět dodatku 

1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, dolnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0347/2019/IO ze dne 10.5.2019 na poskytnutí služeb s názvem „Zpracování PD – 6. ZŠ F-M, Pionýrů 400 – přístavba tělocvičny“.

1.1.	Původní článek 2.  Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje 
o následující ujednání:  

Předmět díla se upravuje o změnu zpracování projektové dokumentace na přístavbu tělocvičny při 6. Základní škole ve Frýdku – Místku, Pionýrů 400. 
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné služby spočívající ve zpracování studie dispozičního řešení přístavby, která bude řešit požadavek na rozšíření sportovního zázemí 
o přístavbu šaten, posilovny, masáží, klubovny, kabinetů trenérů, rehabilitace se saunou 
a vířivkou. 

1.2.	Původní článek  3.  Doba, místo a další podmínky plnění, odst.1 
se upravuje a doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla v rozsahu: 

-	studie přístavby do 60 kalendářních dnů od zahájení

-	PD pro společné povolení do 180 kalendářních dnů od zahájení. Splněním se rozumí podání žádosti o společné povolení a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání 
-	PD pro provádění stavby do 60 kalendářních dnů od písemné výzvy učiněné objednatelem nejdříve od podání žádosti o společné povolení  

1.3.	Původní článek 4. Cena a platební podmínky, odst. 2 se upravuje 
a doplňuje takto:

Cena plnění je členěna následovně:
	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Studie přístavby	35 000,- Kč	7 350,- Kč	42 350,- Kč	
PD pro vydání společného povolení vč. inženýrské činnosti
Dodatečné služby	160 000,- Kč

80 000,- Kč	33 600,- Kč

16 800,- Kč	193 600,- Kč

96 800,- Kč	
Stavebnětechnický průzkum, potřebné zkoušky a ornitologický průzkum, hluková studie	 60 000,- Kč	12 600,- Kč	72 600,- Kč	
Průkaz energetické náročnosti budov 	  8 000,- Kč	 1 680,- Kč	  9 680,- Kč	
PD pro provedení stavby, včetně  činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi, včetně projektu interiérového vybavení (vizualizace interiéru) a vč. stavební připravenosti pro dopojení stávajícího technologického vybavení
Dodatečné služby	

140 000,- Kč

80 000,- Kč	

29 400,- Kč

16 800,- Kč	

169 400,- Kč

96 800,- Kč	
Autorský dozor jednotková cena 
(1 h výkonu AD bez DPH/hod)	Nesčítat v rámci sloupce
500,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce
105,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce
605,- Kč	
Autorský dozor celková cena
(součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin)	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč	
Původní cena dle SoD
Cena dodatečných služeb dle dodatku č. 1
Cena celkem	398 000,- Kč

195 000,- Kč

593 000,- Kč	83 580,- Kč

40 950,- Kč

124 530,- Kč	481 580,- Kč

235 950,- Kč

717 530,- Kč	

II.
	Závěrečná ustanovení 

1.	 Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 

2.	 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel.

3.	Tento dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí 23. schůze Rady města Frýdku - Místku konané dne 9.7.2019.

4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. podle tohoto ujednání.

5.	Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

     Za objednatele:						Za zhotovitele:

     Ve Frýdku-Místku                                			V  Ostravě

    ________________________			__________________________

    Mgr. Michal Pobucký, DiS.,                                            Ing. Roman Diehel          
    primátor                                                                     jednatel