číslo smlouvy objednatele: S/0390/2019/IO		číslo smlouvy zhotovitele________________
číslo dodatku objednatele: 

Dodatek č. 1
SMLOUVY  O  DÍLO

číslo smlouvy objednatele S/0390/2019/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                              xxxxxxxx, vedoucí  IO
                                              tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxx

                                              p.xxxxxxxxxx, technik  IO
                                              tel: xxxxxxxxxxx/ email:xxxxxxxxxx

             xxxxxxxxxxxxx, technik  IO
                                              tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

STAVING Frýdek s.r.o.
se sídlem Skotňa 37, 738 01, Staré Město
zastoupena Martinem Valíčkem,  jednatelem společnosti 
IČ: 25844849
DIČ: CZ25844849
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 21291
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx
ID datové schránky:  vj74hnk
Kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx 

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce k veřejné zakázce „ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 – oprava bazénu – II.“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 03.05.2019 na stavební práce pod názvem „ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 – oprava bazénu – II.“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v rozsahu podrobnostech dle změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou přílohami tohoto dodatku č.1. 

1.2.	Původní článek  3.  Doba, místo a další podmínky plnění, odst.1 
se upravuje a doplňuje takto:
Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu:
Dílčí termíny:
1.	přípravné práce (odsouhlasení, objednání a nákup materiálu):	ihned po nabytí  účinnosti smlouvy
2.	realizace díla:  do 95 dnů od písemné výzvy objednatele (předpokládaný termín zahájení realizace 1.7.2019)

1.3.	Původní článek 5. Cena díla, odst. 1 se upravuje a doplňuje takto:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Původní cena díla	1 368 609,26 Kč	287 407,94 Kč	1 656 017,20 Kč	
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	202 725,84 Kč	42 572,42 Kč	245 298,26 Kč	
Celková cena dle dodatku č. 1	1 571 335,10 Kč	329 980,36 Kč	1 901 315,46 Kč	

Součet veškerých dodatečných prací činí 14,81% původní ceny díla. 

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  a objednatel 1 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 24. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 13.08.2019.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 	
Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku			Ve Starém Městě 

_____________________________			__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.	                                                  Martin Valíček                                         	          
primátor                                                                           jednatel společnosti