číslo smlouvy objednatele: S/0344/2019/IO		číslo smlouvy zhotovitele________________
číslo dodatku objednatele: S/0344/2019/IO/1

Dodatek č. 1

SMLOUVY  O  DÍLO

                      číslo smlouvy objednatele S/0344/2019/IO, číslo smlouvy zhotovitele                                                   

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxx– vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel
a

TESAREM s.r.o.
se sídlem Smetanova 893, 755 01 Vsetín
za kterou jedná: Pavel Juráň, jednatel
IČ: 28591313
DIČ: CZ25891313
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 33564  
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx
ID datové schránky: m6t2br5
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx- stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Provizorní zabezpečení stropních trámů nad 2. NP a krovu, v objektu Národního domu ve Frýdku-Místku“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 03.05.2019 na stavební práce pod názvem „Provizorní zabezpečení stropních trámů nad 2. NP a krovu, v objektu Národního domu ve Frýdku-Místku“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce spočívající v rozsahu podrobnostech dle změnových listů č. 1 a 2., které jsou přílohou tohoto dodatku č.1. 

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Původní cena díla	1 377 738,38,- Kč	289 325,06,- Kč	1 667 063,44,- Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-140 946,48,- Kč	-29 598,76,- Kč	-170 545,24,- Kč	
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	136 946,48,- Kč	28 780,56,- Kč	165 727,04,- Kč	
Celková cena dle dodatku č. 1	1 373 756,40,- Kč	288 488,84,- Kč	1 662 245,24,- Kč	

Součet veškerých dodatečných prací činí 9,94% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD -0,29%.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  a objednatel 1 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 24. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 13.08.2019.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2	
Za objednatele:						Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku dne __________ 2019		Ve _________ dne _________ 2019

_____________________________			__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			          			Pavel Juráň
            primátor                                                                                           jednatel