číslo smlouvy objednatele S/0307/2018/IO
číslo dodatku č. 2 S/0307/2018/IO/2
			
DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxx – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel
a

S u b t e r r a a.s.
se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,
za kterou jedná: Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 1383
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s. v Praze, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. René Pfleger, stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxxxx / email:xxxxxxxxxxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel

•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2  Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Centrum aktivních seniorů“ (dále jen dodatek).

1.	Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání Smlouvy o dílo ze dne 10.05.2018 k veřejné zakázce „Centrum aktivních seniorů“.

1.1.	Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečné stavební práce, které jsou popsané ve změnových listech – ZL č. 1, 2, 20, 21 a jsou přílohou tohoto dodatku.

Obsah změnových listů č. 1, 2, 20, 21:
ZL č. 1 – změna druhu výkopového materiálu zemních prací
ZL č. 2 – změna zásypového materiálu k obsypu základů
ZL č. 20 – dodatečné práce dodávky a montáže drobných elektrospotřebičů
ZL č. 21 – neprováděné práce dle skutečnosti vůči rozpočtovým nákladům stavby

1.2.	Strany sjednávají, že dodatečné práce dle změnového listu č. 1 v objektech SO 13 zpevněných ploch a SO 08 kanalizační přípojky budou doloženy v daném objemu vážními lístky. V opačném případě nebudou dodatečné práce uvedené v tomto odstavci uhrazeny.

1.3.	Původní článek č. 3 Doba, místo plnění, odst. 5 se upravuje takto:

Měření hluku bude provedeno do 3 týdnů od písemné výzvy objednatele, výzva bude učiněna nejdříve po obdržení rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. 

1.4.	V článku č. 3 Doba, místo plnění se doplňuje odst. 6 tohoto znění:

Práce specifikovány změnovým listem č. 20, tj.  dovybavení objektu drobnými elektrospotřebiči, a to 3 ks lednic a 1 ks varné desky, na dodávku a montáž závěsných konstrukcí (konzol) pro umístění 3 ks dataprojektorů budou provedeny v termínu do 31.08.2019. Dodávka dataprojektorů je řešena samostatně mimo tuto smlouvu o dílo.

1.5.	Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

cena díla bez DPH	42.599.999, 00 Kč	
DPH 21 %	8.945.999, 79 Kč	
Cena včetně DPH	51.545.998, 79 Kč	

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ MĚŘENÍ HLUKU VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU BEZ DPH	59.000,00 Kč	
DPH 21 %	12.390,00 Kč	
Cena včetně DPH	71.390,00 Kč	

celková cena dle SoD bez DPH	42.658.999,00 Kč	
DPH 21 %	8.958.389,79 Kč	
Cena dle sod včetně DPH	                                             51.617.388,79 Kč	
CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1	                               - 3.751.449,51 Kč bez DPH
                  tj. - 4.539.253,91 Kč vč. DPH	
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE 
DODATKU Č. 1	3.331.152,48 Kč bez DPH 
tj. 4.030.694,50 Kč vč. DPH	
CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1	42.238.701,97 Kč bez DPH 
tj. 51.108.829,38 Kč vč. DPH	
CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 2	-665.694,25 Kč bez DPH
tj. -805.490,04 Kč vč. DPH	
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 2	1.396.189,58 Kč bez DPH
tj. 1.689.389,39 Kč vč. DPH	
CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 2	42.969.197,30 Kč bez DPH
tj. 51.992.728,73 Kč vč. DPH	

1.6.	Přípustnost změn
Strany konstatují, že dodatečné a neprováděné práce jsou přípustné, a to:
a)	dílem dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – ZL č. 1 a 2, neboť představují v součtu celkový nárůst ceny díla v rozsahu 6,88 % oproti původní ceně díla,
b)	dílem dle ust. § 222 odst. 5  ZZVZ – ZL č. 20, neboť v součtu představují celkový nárůst ceny díla v rozsahu 0,22 % oproti původní ceně díla,
c)	změnový list č. 21 není klasifikován ust. § 222, nýbrž vykazuje hodnotu díla o neprováděné práce s ohledem na objektivní důvody dodávky a práce provedené dle skutečnosti. 

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 

2.	Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.	Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 24. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 13.08.2019. 
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5.	Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy Dodatku č. 2:

příloha č. 1 – změnové listy č. 1, 2, 20, 21
příloha č. 2 – tabulka rekapitulace dle § 222 ZZVZ

Za objednatele						Za zhotovitele	
Ve Frýdku-Místku, dne __________ 2019			V Praze, dne_____________ 2019

__________________________			            __________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			Ing. Petr Kajer
primátor			ředitel divize 2 na základě plné moci