Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek	
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                              xxxxxxxxxxxx, vedoucí  IO
                                              tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxx

                                              xxxxxxxxxx, technik  IO
                                              tel: xxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

IKON, s.r.o. 
se sídlem Příborská 1390, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupena Ing. Lumírem Ivánkem, jednatelem
IČ: 45197369
DIČ: CZ45197369
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 2853  
Č. účtu: xxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxx
Fax: xxxxxxxx
E-mail: info@ikonfm.cz

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 03.04.2019 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v rozsahu a podrobnostech dle změnových listů č. 1 až 4., které jsou přílohou tohoto dodatku č.1. 

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH	
Původní cena díla	4 100 346,46 Kč	861 072,76 Kč	4 961 419,22 Kč	
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	   156 767,31 Kč	  32 921,14 Kč	  189 688,45 Kč	
Celková cena dle dodatku č. 1	4 257 113,77 Kč	893 993,90 Kč	5 151 107,67 Kč	

Součet veškerých dodatečných prací činí 3,82% původní ceny díla.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  a objednatel 1 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 25. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 10.09.2019.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 4	

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku ____________ dne			Ve Frýdku-Místku ____________ dne

_____________________________			__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.	                                                            Ing. Lumír Ivánek	          
primátor                                                                			jednatel