DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0501/2019/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                              xxxxxxxxx, vedoucí  IO
                                              tel: xxxxxxxx/ email: xxxxxxxx

                                              xxxxxxxxxx, technik  IO
                                              tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxx
	
-	dále jen objednatel
a

SAPEKOR s.r.o. 
se sídlem Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
zastoupena Hanou Weissovou, jednatelkou společnosti
IČ: 01874241
DIČ: CZ01874241
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 56813
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx
tel: +xxxxxxxx
e-mail: info@sapekor.com

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce dětského hřiště v Sadech B. Smetany“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku

1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.7.2019 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce dětského hřiště v Sadech B. Smetany“.

1.1	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v bourání betonových konstrukcí, zřízení podezdívky plotu z betonových palisád a plochy pro ping-pong stoly. 
Dále se předmět plnění upravuje o neprováděné práce spočívající v menší vzdálenosti skládky odpadu od staveniště, v úpravě poplatku za skládkování, neprovádění bednění části základových patek a zkrácení délky betonového obrubníku pro mlatový chodník.
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 a 2, viz příloha č. 1 a 2. 

1.2	Původní článek 3. Doba, místo plnění, odst. 1 se doplňuje:
Realizací zpevněné plochy pro ping – pong se termín dokončení stavby prodlužuje  
o 20 kalendářních dnů, pouze pro tuto část dodatečných prací.

1.3	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
 	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Původní cena díla	2 722 987,72 Kč	571 827,42 Kč	3 294 815,14 Kč	
Neprováděné stavební práce 
dle dodatku č. 1	-93 484,24 Kč	19 631,69 Kč	-113 115,93 Kč	
Dodatečné stavební  práce 
dle dodatku č. 1	406 843,97 Kč	85 437,23 Kč	492 281,20 Kč	
Celkové navýšení ceny 
dle dodatku č. 1	313 359,73 Kč	65 805,54 Kč	379 165,27 Kč	
Celková cena dle dodatku č. 1	3 036 347,45 Kč	637 632,96 Kč	3 673 980,41 Kč	

Součet veškerých dodatečných prací činí 14,94% původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 11,51%.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 1 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 28. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 8.10.2019. 
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Za objednatele:		      				Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku dne _________2019			V Českém Těšíně dne _______2019

_____________________________		         __________________________
         Mgr. Michal Pobucký, DiS.	                                                      Hana Weissová
                  primátor                                                                  jednatelka společnosti