číslo smlouvy objednatele: S/0344/2019/IO		číslo smlouvy zhotovitele________________
číslo dodatku objednatele: S/0344/2019/IO/2  

Dodatek č. 2

SMLOUVY  O  DÍLO
                                                
uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:  xxxxxxxxxx./ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx– vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx /email:xxxxxxxxxxxxxxx
-	dále jen objednatel
a

TESAREM s.r.o.
se sídlem Smetanova 893, 755 01 Vsetín
za kterou jedná: Pavel Juráň, jednatel
IČ: 28591313
DIČ: CZ25891313
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. Zn. Oddíl C, vložka 33564  
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: m6t2br5
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxx– stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxx/ email: xxxxxxxxx 
-	dále jen zhotovitel
-	
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Provizorní zabezpečení stropních trámů nad 2. NP a krovu, v objektu Národního domu ve Frýdku-Místku“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je vyčíslení neprováděných prací z ujednání smlouvy o dílo ze dne 03.05.2019 na stavební práce pod názvem „Provizorní zabezpečení stropních trámů nad 2. NP a krovu, v objektu Národního domu ve Frýdku-Místku“.
Jedná se zejména o stavební práce, kterými nedošlo k předpokládanému porušení podhledových konstrukcí, a nebylo potřeba budovat lešení pro opravy omítek stropů a také podpěrné konstrukce pro montáže zesílení stropních trámů. Jedná se tedy o práce, které nebylo potřeba provádět i z důvodu opatrného přístupu realizační firmy a o práce, které byly účtovány na základě skutečného množství, tzn. dle měřených cen dle smlouvy o dílo.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se snižuje o neprováděné práce spočívající v rozsahu podrobnostech dle změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku č.2. 

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Původní cena díla	1 377 738,38 Kč	289 325,06 Kč	1 667 063,44 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-140 946,48 Kč	-29 598,76 Kč	-170 545,24 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	136 946,48 Kč	28 780,56 Kč	165 727,04 Kč	
Celková cena dle dodatku č. 1	1 373 756,40 Kč	288 488,84 Kč	1 662 245,24 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 2
(po zaokrouhlení)	-354 983,36 Kč	- 74 547,00	- 429 530,00	
Celková cena dle dodatku č. 2
(po zaokrouhlení)	1 018 773,04 Kč	213 942,39	1 232 716,00 Kč	

Součet veškerých dodatečných prací činí 9,94% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD – 26,05 %.

1.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  a objednatel 1 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 30. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.11.2019.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:   Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Za objednatele:						Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku dne __________ 2019		Ve _________ dne _________ 2019

_____________________________			__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			          			Pavel Juráň
            primátor                                                                                           jednatel