číslo smlouvy objednatele:  S/0501/2018/IO			číslo smlouvy zhotovitele: 841/OBDE/255/2018
číslo dodatku objednatele:  S/0501/2018/IO/II	

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0501/2018/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
bankovní spojení/číslo účtu:xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxx/ email: xxxxxxx

xxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx/email: xxxxxxxxx

xxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxx/email: xxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

STRABAG a.s. 
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena Ing. Klárou Kalábovou – ekonomem Oblasti Střed, o.z. Morava
                    tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxx
                    xxxxxxxxxxx– vedoucím OTÚ Oblasti Střed, o.z. Morava
                    Tel: xxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxx
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 7634
bankovní spojení/číslo účtu:xxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 8yuchp8
Kontaktní osoba ve věcech technických:xxxxxxx– vedoucí Provozní jednotky,
              tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.10.2018 na stavební práce pod názvem „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

Dodatečné práce na SO 203:
a)	Upřesnění skutečného množství betonu a výztuže mostní konstrukce. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
b)	upřesnění skutečného množství betonu patek pro stabilizaci dlažby ve svahu pod mostním objektem. Jedná se o upřesnění s ohledem na změnu technického řešení zajištění svahu pro dálniční těleso, která je vyvolána zhotovitelem nadřazené dopravní infrastruktury, a to na základě doplňujícího geotechnického průzkumu,
c)	navýšení průřezu odvodňovacích potrubí. Změna byla vyvolána na základě hydrotechnického výpočtu provedeném v rámci průzkumných prací a byla zapracována do realizační dokumentace stavby.

Neprováděné práce na SO 203:
a)	Na základě doplňujícího geotechnického průzkumu provedeného zhotovitelem stavy nadřazené dopravní infrastruktury došlo k změně technického řešení zajištění svahu pro dálniční těleso. Původně navržená gabionová stěna bude nahrazena „přitěžovací lavicí“, a to v místě stavebního objektu 203, jehož součástí byla úprava svahu pod mostem. Z tohoto důvodu došlo k upřesnění rozsahu provedení dlažeb z lomového kamene včetně podkladu, které měly být provedeny v rámci SO 203, a dále k zrušení sanačních žeber z drceného kameniva,
b)	snížení skutečného množství betonu a výztuže pilotového založení. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
c)	snížení skutečného mostních odvodňovacích souprav. Jedná se o dodávky, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
d)	odpočet odvodňovacího potrubí, které bylo nahrazeno potrubím většího průřezu. Změna byla vyvolána na základě hydrotechnického výpočtu provedeném v rámci průzkumných prací a byla zapracována do realizační dokumentace stavby.

Dodatečné práce na SO 206:
a)	Upřesnění skutečného množství betonu a výztuže mostní konstrukce a říms. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
b)	upřesnění skutečného množství dlažeb z lomového kamene, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
c)	navýšení dimenze příkopových žlabů. Změna vznikla upřesněním odvodňovací kapacity a je zapracována v realizační dokumentace stavby,
d)	prodloužení mostního zábradlí za římsami o další 2 sloupky a to z důvodu zajištění bezpečnosti a správného napojení svodidla mimo most.

Neprováděné práce na SO 206:
a)	Zrušení štěrkopískového podsypu pod dlažbou, který je účtován dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
b)	snížení skutečného množství mostních odvodňovacích souprav. Změna vznikla upřesněním v realizační dokumentace stavby,
c)	odpočet příkopových žlabů, které byly nahrazeny žlaby vyšší dimenze. Změna byla zapracována v realizační dokumentace stavby.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku č.2. 

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena sjednaná v SOD	62 000 014,83 Kč bez DPH,
tj. 75 020 017,94 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	1 157 667,45 bez DPH,
tj. 1 400 777,61 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 3 547 350,84 Kč bez DPH,
tj. - 4 292 294,52  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	59 610 331,44 Kč bez DPH,
tj. 72 128 501,04 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	1 100 003,35 Kč bez DPH,
tj. 1 331 004,05 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 987 325,35 Kč bez DPH,
tj. - 1 194 663,67 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	59 723 009,44 Kč bez DPH,
tj. 72 264 841,42 Kč vč. DPH	

1.3.	Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 6 hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje změnu hodnoty závazku oproti původně sjednané ceně díla 5,23 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,37 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celková změna ceny oproti původní ceně v SoD činí -3,67 %

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 36. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 11.02.2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
- Příloha č. 2 – Změnové listy č. 3 a 4

Za objednatele:							Za zhotovitele:
-	na základě plné moci

Ve Frýdku-Místku                                                             	V Olomouci

_________________________					__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.					Ing. Klára Kalábová
primátor                                                                                         ekonom Oblasti Střed
                                                                                                      o.z. Morava

                                                                                                      __________________________
                                                                                                      Ing. Vítězslav Bujnoch  
                                                                                                      vedoucí OTÚ Oblasti Střed
                                                                                                      o.z. Morava