DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0039/2017/IO
uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek,  Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, vedoucí IO, xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxxxxx /xxxxx
xxxxxxxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel 

a

Dobré stavby, s.r.o. 
se sídlem Ostrava – Kunčice, Serafinova 396/9, PSČ 719 00
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Cigánek, jednatel
IČ: 25828495
DIČ: CZ25828495
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl C, vložka 19999
Č. účtu: xxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxx
Fax: --------
E-mail: xxxxxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo pod názvem „Penzion pro seniory, ul. Lískovecká 86 – revitalizace objektu technického zázemí B3 včetně spojovacího krčku“, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.	Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 06.02.2017 na projektovou dokumentaci pod názvem „Penzion pro seniory, ul. Lískovecká 86 – revitalizace objektu technického zázemí B3 včetně spojovacího krčku“

1.1.	Původní článek č. 1 Úvodní ustanovení se upravuje a doplňuje o následující ujednání: a) Dle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby byly realizovány stavební práce v rozsahu platného stavebního povolení, a to jen technické zázemí B3 a střešní plášť objektu spojovacího krčku. Ostatní práce nebyly provedeny z administrativních důvodů.
b) Z důvodu změn a úprav dotčené projektové dokumentace je nutné zpracovat její revizi včetně nového výkazu výměr a položkového rozpočtu. Tato revize bude zpracována pod názvem „ Revitalizace penzionu pro seniory ul. Lískovecká 86 – spojovací krček“. Rozsah stavebních prací na obvodovém plášti objektu spojovacího krčku se nemění.

1.2.	Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: a) Zhotovitel zpracuje revizi projektové dokumentace viz výše v rozsahu doplnění a zapracování detailů:
-   rohové řešení propojení objektu technického zázemí a spojovacího krčku
- oplechování KZS objektu spojovacího krčku pod atikou včetně potřebných výkresů a textové části dle skutečně provedeného stavu
-  oprava vnitřních sloupů v místech a plochách poškození prasklých vrstev
b) Zhotovitel zpracuje samostatný výkaz výměr včetně položkového rozpočtu pro stavební práce související s revitalizací spojovacího krčku, resp. v celém rozsahu revize projektové dokumentace
c) Provedení inženýrské činnosti v rozsahu požadavků stavebního úřadu k zabezpečení vydání stavebního povolení pro objekt spojovacího krčku. Především aktualizace již vydaných stanovisek. Objednatel zajistí souhlas s provedením stavby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

1.3.	Původní článek č. 3 Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného    
 předmětu plnění díla nejpozději do 31.03.2019. Zahájení prací na plnění díla    
 se rozumí datem nabytí  účinnosti  této smlouvy. 

1.4.	Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Cena plnění je členěna následovně:
	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH	
Vyhotovení DPS + IČ	89 000,00 Kč	18 690,00 Kč	107 690,00 Kč	
Autorský dozor jednotková cena 
(1 h výkonu AD bez DPH/hod)	Nesčítat v rámci sloupce
600,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce
126,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce
726,00 Kč	
Autorský dozor celková cena
(součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin)	18 000,00 Kč
(v I. etapě vyfakturováno 9.000,00 Kč)	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč	
Cena celkem	107 000,00 Kč	22 470,00 Kč	129 470,00 Kč	

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH	
Revize DPS SO 01 + IČ	21.000,00 Kč	4.410,00 Kč	25.410,00 Kč	
Rozpočet, výkaz výměr	  7.000,00 Kč	1.470,00 Kč	  8.470,00 Kč	
Cena celkem	135.000,00 Kč	28.350,00 Kč	163.350,00 Kč	

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu. 

2.	Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

3.	Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 7. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 29.01.2019.

4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

      Za objednatele:			Za zhotovitele:

     Ve Frýdku-Místku, dne 			V Ostravě, dne 

    ________________________		        _________________________		

Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor                            Ing. Martin Cigánek, jednatel