číslo smlouvy zhotovitele: 841/OBDE/255/2018

		DODATEK Č. 1
		
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0501/2018/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx./ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx– vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxx

xxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx/email: xxxxxxxx

xxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a

STRABAG a.s. 
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupena Ing. Klárou Kalábovou – ekonomem Oblasti Střed, o.z. Morava
                    tel: xxxxxxxxxxxx/ email:xxxxxxxxxx
                    Ing. Vítězslavem Bujnochem – vedoucím OTÚ Oblasti Střed, o.z. Morava
                    Tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxxxx
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 7634
bankovní spojení/číslo účtu:xxxxxxxxxxxx., č.ú: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 8yuchp8
Kontaktní osoba ve věcech technických:xxxxxxxxxx– vedoucí Provozní jednotky,
              tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.10.2018 na stavební práce pod názvem „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce:
Dodatečnými stavebními pracemi jsou:
-	Na SO 203 došlo k navýšení základny vrtné plošiny z důvodu zatopení stávajícího zářezu realizované dálnice D48, čímž došlo k prodloužení délek pilot, navýšení množství výztuže, zřízení pracovních násypů pod pilotážní plošinu u pilířů P2 a P3.
-	Na SO 206 bylo nutné na základě doplňujícího geotechnického průzkumu provést opatření v návrhu založení mostního objektu, resp. mostního pilíře P2, spočívající v rozšíření železobetonového základu pod pilířem P2, navýšením počtu pilot a nutným zvýšením třídy betonu všech pilot.

Neprováděnými stavebními pracemi jsou:
-	V rámci koordinace se stavbou „D 48 Frýdek-Místek – obchvat“ bylo dohodnuto financování úprav protihlukových stěn v rámci stavby této nadřazené dopravní infrastruktury.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1. 

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	62 000 014,83 Kč	
dODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE bez dph DLE DODATKU Č. 1	1 157 667,45 Kč	
nEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ dph DLE DODATKU Č. 1	- 3 547 350,84 Kč	
cELKOVÁ cena DLE DODATKU Č. 1 bez DPH	59 610 331,44 Kč	

1.3.	Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle  dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 5,72 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve smyslu ust. § 222 odst. 6 hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 1,87 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 1,87 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkové snížení ceny oproti původní ceně v SoD činí -3,85 %.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 27. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 24.9.2019.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
- Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:							Za zhotovitele:
-	na základě plné moci

Ve Frýdku-Místku                                                             	V Olomouci

_________________________					__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.					Ing. Klára Kalábová
primátor                                                                                         ekonom Oblasti Střed
                                                                                                      o.z. Morava

                                                                                                      __________________________
                                                                                                      Ing. Vítězslav Bujnoch                                                                                                                                             
vedoucí OTÚ Oblasti Střed
                                                                                                      o.z. Morava