DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:xxxxxxxx./ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx– vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxx

xxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx/e-mail: xxxxxxxxx
                                         
                                                  xxxxxxx-  technik investičního odboru 
                                                  tel: xxxxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxxxxx
-	dále jen objednatel

a

OSBAU s.r.o.
se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba
zastoupena Tomášem Hrtánkem - jednatelem
IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 57 221
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
ID datové schránky: p46z65a
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Xxxxxxxx
tel: xxxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxxxx

xxxxxxxx
tel: xxxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxxxx
-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86 – II. etapa“ (dále jen dodatek).

1.	Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 04.04.2019 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86 – II. etapa“.

1.1.	Původní článek č. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Ve dvou bytech nebyla dodána nová kuchyňská linka z důvodu požadavku nájemníků odsouhlaseného provozovatelem objektu. Zařízení staveniště bylo fakturováno dle skutečně využitých nákladů k jednotlivým položkám. Podrobné vyčíslení nákladů je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou.

1. 2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Cena za dílo dle Dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	
Cena díla
	DPH 15 %	Celkem	
CELKEM dle SoD	10.581.095,27 Kč	1.587.164,29 Kč	12.168.259,56 Kč	
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1	- 75.670,63 Kč	-  11.350,59 Kč	- 87.021,22 Kč	
Cena díla dle Dodatku č. 1	 10.505.424,64 Kč	1.575.813,40 Kč	 12.081.238,34 Kč	

1.3.	Přípustnost změn – strany konstatují, že přípustnost změn smlouvy je založena dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu de minimis, neboť se jedná o přípustnou změnu vymíněnou objednatelem a hodnota neprováděných prací oproti sjednané ceně díla činí – 0,48 %.

2. Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu. 

2.	Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

3.	Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 28. schůze Rady města        Frýdku-Místku ze dne 08.10.2019.

4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. ke smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy:
Změnový list č. 1

	

Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku  dne:                                                              V Orlové – Porubě dne:

_________________________			__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			Tomáš Hrtánek
primátor                                                                                       jednatel