Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: …………/ ………..
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
				xxxxxxxxxxxxxxx– vedoucí investičního odboru
				tel.: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxxx/e-mail: xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.
se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava - Přívoz
jejímž jménem jedná: Jan Němec, statutární ředitel
IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 1441
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: cifdgfv
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
tel: xxxxx/ email: xxxxxxxx

xxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího
tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce Revitalizace penzionu pro seniory Lískovecká 86 – spojovací krček (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.07.2019 na stavební  práce pod názvem Revitalizace penzionu pro seniory Lískovecká 86 – spojovací krček.

1.1. Původní článek č. 2  Předmět smlouvy se upravuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečné stavební práce, které jsou popsané  ve změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto dodatku.
Jedná se především o rozšíření předmětu díla pro úpravu povrchu přilehlé stěny sousedního pozemku, úpravu výměry dle skutečného zaměření pro povrchovou úpravu venkovních sloupů. Neprováděné práce jsou vyčísleny dle skutečně provedených stavebních prací a výměr.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

cena celkem bez DPH	1 372 157,00 Kč	
DPH Z ceny díla 15%	205 824,00 Kč	
Cena celkem včetně DPH	1 577 981,00 Kč	
DODATEČNÉ PRÁCE DLE DODATKU Č. 1	111 271,00 Kč bez DPH, 
tj. 127 961,65 Kč včetně DPH	
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE DLE DODATKU Č. 1	- 27 761,00 Kč bez DPH, 
tj. - 31 925,15 Kč včetně DPH 	
CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1	1 455 667,00 Kč bez DPH, 
tj. zaokrouhleno1 674 018,00 Kč včetně DPH	

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že dodatečné a neprováděné práce jsou přípustné dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť představují v součtu přípustných změn 10,13 % původní hodnoty závazku, tj. 10,13 % původní ceny díla.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu. 

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1  je uzavřen na základě rozhodnutí 31. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 26. 11. 2019.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. ke smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy:
Změnový list č. 1
Rekapitulace dle § 222 ZZVZ

	

Za objednatele:			                  Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                V Ostravě

_________________________		        __________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			        Jan Němec
primátor                                                             statutární ředitel