DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0618/2019/IO 

Níže označené smluvní strany-------------------------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, vedoucí IOxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
dále jen objednatel 
 a

Ing. Štěpán Šnupárek 
se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava
IČO: 72978325
DIČ: CZ7506045580
č. účtu: xxxxxxxxxxx
tel: +420 xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD - ZŠ a MŠ Skalice 192 - hydroizolace spodní stavby“ následujícího znění a obsahu:

I.
Předmět dodatku 

1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, dolnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0618/2019/IO ze dne 11.9.2019 na poskytnutí služeb s názvem „Zpracování PD - ZŠ a MŠ Skalice 192 - hydroizolace spodní stavby“.

1.1.	Původní článek 2.  Předmět a rozsah plnění odst. 2 písm. b) se upravuje a doplňuje o následující ujednání:  

Provedení zateplení fasády včetně souvisejících prací a zateplení půdy. Dodávka a instalace rekuperačních vzduchotechnických jednotek do výukových prostor. 

1.2.	Původní článek  3.  Doba, místo a další podmínky plnění, odst.1 
se upravuje a doplňuje takto:

1.	Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do: 

ÚS + DPS vč. dokladů IČ	do 210 kalendářních dnů ode dne nabytí účinností smlouvy

Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci ke kontrole minimálně                         10 kalendářních dnů před ukončením lhůty.	

1.3.	Původní článek 4. Cena a platební podmínky, odst. 2 se upravuje 
a doplňuje takto:

1.	Cena plnění je členěna následovně:
	Jednotková cena za 1h v Kč bez DPH	počet jednotek	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH	
Stavebnětechnický průzkum, vč. zaměření stávajícího stavu, hydrogeologického průzkumu, ornitologického průzkumu aj.			75.000,00	15.750,00	90.750,00	
DPS - hydroizolace spodní stavby vč. sanace zdiva a prací souvisejících			100.000,00	21.000,00	121.000,00	
DPS - vzduchotechnika			50.000,00	10.500,00	60.500,00	
DPS - dešťová kanalizace vč. akumulační nádrže a prací souvisejících			50.000,00	10.500,00	60.500,00	
Inženýrské činnosti a činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi			38.000,00	7.980,00	45.980,00	
Dodateční práce dle Dodatku č.1 
DPS -zateplení fasády vč. prací souvisejících			132.500,00	27.825,00	160.325,00	
Autorský dozor	310,00	100	31.000,00	6.510,00	37.510,00	
Cena celkem			476.500,00	100.065,00	576.565,00	

II.
	Závěrečná ustanovení 

1.	 Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 

2.	 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel.

3.	Tento dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí 33. schůze Rady města Frýdku - Místku konané dne 17.12.2019.

4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. podle tohoto ujednání.

5.	Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

     Za objednatele:						Za zhotovitele:

     Ve Frýdku-Místku, dne………….                                	V Ostravě, dne………….

    ________________________			__________________________

    Mgr. Michal Pobucký, DiS.,                                         Ing. Štěpán Šnupárek          
    primátor