číslo smlouvy objednatele:  S/0501/2018/IO			číslo smlouvy zhotovitele: 841/OBDE/255/2018

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0501/2018/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/ xxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx– vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx/email: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx/email: xxxxxxxxxxx

dále jen objednatel

a

STRABAG a.s. 
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena Ing. Klárou Kalábovou – ekonomem Oblasti Střed, o.z. Morava
                    tel: xxxxxxxx/ email: xxxxxxx
                    Ing. Vítězslavem Bujnochem – vedoucím OTÚ Oblasti Střed, o.z. Morava
                    Tel: xxxxxxx550 / email: xxxxxxxxxx
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 7634
bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú: xxxxxxx/xxxxxx
ID datové schránky: 8yuchp8
Kontaktní osoba ve věcech technických:xxxxxxxxx– vedoucí Provozní jednotky,
              tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 4 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.10.2018 na stavební práce pod názvem „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
K dodatečným pracím na SO 112 došlo z objektivních důvodu dle skutečnostem vzniklým během realizace díla:
Objednatel požaduje opravu 2 stávajících degradovaných horských vpustí, které odvádějí povrchové vody z místní komunikace SO 112. Práce spočívají v odbourání starého betonu, výroby ocelových mříží, jejich osazení a zpětné obetonování. Oprava těchto vpustí nebyla součástí zadávací dokumentace. 

K dodatečným pracím na SO 115 došlo z objektivních důvodu dle skutečnostem vzniklým během realizace díla:
Jedná se o dodatečné stavební práce vyvolané objektivními požadavky objednatele na zvýšení plynulosti provozu na komunikaci SO 115 a zvýšení bezpečnosti chodců v podobě rozšíření části silničního tělesa. Komunikace je rozšířena tak, aby navazovala na chodníkovou římsu, a bylo docíleno možnosti vyhnutí se protijedoucích vozidel. 

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. 7 a 8, které jsou přílohou tohoto dodatku č.4.

1.2.	Původní článek 3. Doba, místo plnění, odstavec 3. se doplňuje o následující ujednání:
1.2.1.	Strany deklarují, že:
a)	na základě článku 3 doba a místo plnění a dodatku č. 3 je zhotovitel povinen provést dílo v části SO 112, SO 203 a SO 431 do 30.09.2020,
b)	na základě článku 3 doba a místo plnění a dodatku č. 3 je zhotovitel povinen provést dílo v části SO 115, SO 206 a SO 433 do 15.10.2020,
c)	s ohledem na překážky vyvolané nadřazenou stavbou D48 Frýdek-Místek, obchvat, jejichž investorem je ŘSD ČR a zhotovitelem sdružení Společnost FM, obchvat – I. etapa, vedoucí sdružení Porr a.s., 
se proto:
1.2.2.	tímto dodatkem prodlužuje termín provedení části díla v rozsahu provedení kamenických prací pod mostem SO 203 a SO 431 celkem o 75 dnů, tedy do 15.12.2020,
1.2.3.	tímto dodatkem prodlužuje termín provedení části díla v rozsahu provedení kamenických prací pod mostem SO 206 a SO 433 celkem o 60 dnů, tedy do 15.12.2020,
1.2.4.	tímto dodatkem mění termín realizace a dokončení části díla u části stavebních objektů SO 112 a SO 115 v rozsahu osazení dálničního oplocení (dle příloh č. 3 a 4) ve lhůtě do 2 měsíců od doručení písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatel zašle výzvu nejpozději do 30. 08. 2021. Přesný termín bude upřesněn v rámci průběžné koordinace obou staveb.

1.3.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	62 000 014,83 Kč bez DPH,
tj. 75 020 017,94 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	1 157 667,45 bez DPH,
tj. 1 400 777,61 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 3 547 350,84 Kč bez DPH,
tj. - 4 292 294,52  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	59 610 331,44 Kč bez DPH,
tj. 72 128 501,04 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	1 100 003,35 Kč bez DPH,
tj. 1 331 004,05 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 987 325,35 Kč bez DPH,
tj. - 1 194 663,67 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	59 723 009,44 Kč bez DPH,
tj. 72 264 841,42 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	452 113,20 Kč bez DPH,
tj. 547 056,97 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	- 0,00 Kč bez DPH,
tj. – 0,00 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 3	60 175 122,64 Kč bez DPH,
tj. 72 811 898,39 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	134 086,80 Kč bez DPH,
tj. 162 245,03 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4	- 0,00 Kč bez DPH,
tj. – 0,00 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 4	60 309 209,44 Kč bez DPH,
tj. 72 974 143,42 Kč vč. DPH	

1.4.	Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 4 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 6 hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje změnu hodnoty závazku oproti původně sjednané ceně díla o 6,84 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 2,99 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celková změna ceny díla ve smlouvě ve znění dodatků č. 1 až 4 činí -2,73 %.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 58. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 22. 09. 2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 4 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 4 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 4 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
- Příloha č. 2 – Změnové listy č. 7 a 8
- Příloha č. 3 – Situační zákres dálničního oplocení v rámci SO 112
- Příloha č. 4 – Situační zákres dálničního oplocení v rámci SO 115

Za objednatele:							Za zhotovitele:
-	na základě plné moci

Ve Frýdku-Místku                                                             	V Olomouci

_________________________					__________________________
RNDr. Michal Pobucký, DiS.					Ing. Klára Kalábová
primátor                                                                                         ekonom Oblasti Střed
                                                                                                      o.z. Morava

                                                                                                      __________________________
                                                                                                      Ing. Vítězslav Bujnoch  
                                                                                                      vedoucí OTÚ Oblasti Střed
                                                                                                      o.z. Morava