DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. S/0447/2020/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:  xxxxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxx
xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxx /email: xxxxxxxx
xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a 

SAPEKOR s.r.o.
se sídlem Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
zastoupena: Mgr. Hana Wiessová, jednatel
IČ: 01874241
DIČ: CZ01874241
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, vložka 56813
č. účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx
tel: +xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0447/2020/IO ze dne 29. 07. 2020 k veřejné zakázce „Nové dětské hřiště v Lískovci“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0447/2020/IO ze dne 29. 07. 2020 následujícího rozsahu:
1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	odstranění základové patky stávajícího kolotoče vč. odvozu na skládku,
-	provedení zpevněných ploch z plastových zatravňovacích tvárnic ke zpevněnému příjezdu.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	v odpočtu odpadkového koše a 2 ks dřevěných laviček s ocelovou nosnou konstrukcí.
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 a 2 viz příloha č. 1. 

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	882 691,68	185 365,25	1 068 056,93	
 Neprováděné stavební práce 
 dle dodatku č. 1	        -33 825,00	-7 103,25	  -40 928,25	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 1	31 242,68	6 560,97	37 803,65	
 Celkové snížení ceny 
 dle dodatku č. 1	-2 582,32  	-542,28	-3 124,60	
 Celková cena dle dodatku č. 1	880 109,36	184 822,97	1 064 932,33	

Dle dodatku č. 1 součet veškerých neprováděných prací po započtení dodatečných prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy -0,3 %.

1.3. Změny závazku dle tohoto dodatku naplňují přípustnost změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 60. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 20. 10. 2020.

4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2 

Ve Frýdku-Místku dne __________			V Českém Těšíně dne_______________

    Za objednatele:					Za zhotovitele:

    _________________________			__________________________
    RNDr. Michal Pobucký, DiS.				Mgr. Hana Wiessová 
    primátor						jednatel