DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem:				 	Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 			RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  						00296643
DIČ: 						CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: 			xxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: 				w4wbu9s
tel.:						558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
	tel. xxxxxxxxx/email: xxxxxxxxxx
		xxxxxxxxx, technik  IO
                                     	tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxx
       	xxxxxxxx, technik  IO
                                     	tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel

a

INTOZA s.r.o. 
se sídlem: 				Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky 
zastoupena: 				Tomášem Závadou, jednatelem 
IČ: 					25873261 
DIČ: 					CZ25873261 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 23847 
bankovní spojení/číslo účtu: 		xxxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: 			th2cmhn
zástupce ve věcech smluvních: 	Tomáš Závada, jednatel 
e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 	xxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
					tel: xxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“ následujícího znění a obsahu. 

ČLÁNEK 1
Předmět DODATKU
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0453/2020/IO ze dne 4. 8. 2020 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“, a to z důvodů,
1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v:
-	provedení záměny 7 kusů typizovaných dveří ve vestibulu do zázemí rekonstruované části objektu za 7 kusů atypických dveří.
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1, viz příloha č. 1 dodatku č. 3.

1.2. Původní článek 3.  DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ, bod 2 se v písmenu a) mění následovně:
a)	I. etapa do 157 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, tzn. do 31.01.2021. 
Strany konstatují, že změna termínu dokončení I. etapy odpovídá ujednání článku 3 odst. 10 smlouvy, podle kterého je ujednáno, že Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany objednatele nebo překážek na straně objednatele v podobě zjištěných vad v projektové dokumentaci pro provedení stavby, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče rozpoznat, a které mají vliv na termín dokončení díla jako celku, a to o přiměřenou dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.

3. Strany konstatují, že úprava termínu dokončení I. etapy odpovídá shora uvedeným ujednáním smlouvy, a proto se jedná o přípustnou změnu smlouvy dle § 222 ZZVZ. 

1.3. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	7 860 000,00	1 650 600,00	9 510 600,00	
 Neprováděné stavební práce 
 dle dodatku č. 3	 - 84 103,92	    65 547,15	   - 101 765,74	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 3	 396 233,22	    83 208,98	     479 442,20	
 Celkové navýšení ceny dle    
 dodatku č. 3	 312 129,30	    65 547,15	     377 676,45	
 Celková cena dle dodatku č. 3 	8 172 129,30	1 716 147,15	 9 888 276,45	

1.4. Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázky, a to:
a)	dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem a neprováděné stavební práce dle změnového listu č. 1 naplňují tzv. přípustnou změnu deminimis ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných a neprováděných prací činí 6,11 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla.
Součet dodatečných prací po započtení neprováděných prací sjednaných v dodatku č. 3 smlouvy představuje navýšení 3,97 % oproti původní celkové ceně dle smlouvy.

ČLÁNEK 2
  ZÁVĚREČNÁ ujednání

1.	Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3.	Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 64. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 08. 12. 2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 2 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku		V Ostravě 

_____________________________		__________________________
RNDr. Michal Pobucký, DiS.		Tomáš Závada 
primátor		jednatel