DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0504/2020/IO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat:	Petr Korč – primátor
IČ:  				00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.  				558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx, pověřená vedením IO, 		
xxxxxxxxxxxxx /xxxxxx
xxxxxxxxxxxx, technik IO, 
xxxxxxxxxz/xxxx

•	dále jen objednatel 
 a

ATRIS, s.r.o. 
se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČ: 				28608909
DIČ: 				CZ28608909
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 34492  
č. účtu: 			xxxxxxx/xxxxxxx
tel: 				xxxxxxxxxx
e-mail:				ixxxxxxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD –  Hasičské sportovní hřiště ul. Pavlíkova“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1
PŘEDMĚT DODATKU
1.	Smlouva o dílo č. S/0504/2020/IO byla uzavřena za účelem zpracování komplexní projektové dokumentace pro akci Hasičské sportovní hřiště ul. Pavlíkova v rozsahu studie se zaměřením a průzkumy, projektové dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkonu autorského dozoru a inženýrské činnosti.

2.	Vzhledem ke skutečnosti, že

a)	V důsledku zvýšení cen stavebních prací a materiálů v době od uzavření smlouvy k dnešnímu dni nelze dodržet předpokládané investiční náklady stavby, které byly ve smlouvě o dílo v čl. 2 odstavec 3.3.3 určeny ve výši 30 mil. Kč vč. DPH,
b)	nelze zaručit, že smlouva v budoucnu dosud nesplněné části nezanikne z důvodu následné nemožnosti plnění, 
c)	na základě ujednání v článku 9 odstavci 5 smlouvy si objednatel vyhradil právo odstoupit od smlouvy po ukončení toho kterého stupně projektování, v tomto případě po ukončení studie,

ukončují strany smlouvu o dílo vzájemnou dohodou.

3.	Smluvní strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku jsou vypořádány veškeré vzájemné závazky ze smlouvy o dílo.

článek 2
	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.	Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2.	Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 105. schůze Rady města Frýdku - Místku, konané dne 17.5.2022.
3.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.
     Za objednatele:						Za zhotovitele:
     Ve Frýdku-Místku, dne                               		V Ostravě, dne

    ________________________		          __________________________

    Petr Korč                                           			Barbora Kyšková            
    primátor                                                                      jednatelka