Dodatek č. 3
smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxx / email: xxxxxxx 
xxxxxxxxx -  technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx/ xxxxxxxxx/ email: xxxxxx	
xxxxxxxxx, technik  IO
tel: xxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o. 
se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 14167
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx, axxxxxxxxx
ID datové schránky: veihwuy
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx, 
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
 
1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy 
o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	ve změně trasy a úpravě nové splaškové kanalizace z důvodu kolize se stávající kanalizací v délce cca 21 m dle změnového listu ZL č. 4
Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	v odpočtu betonových šachet S9 a S10, které se z důvodu kolize nové splaškové kanalizace se stávající kanalizací neprovedou dle změnového listu ZL č. 4
Změnovým listem č. 5 se předmět plnění nerozšiřuje ani neupravuje, jedná se pouze o záměnu položek soupisu stavebních prací týkající se záměny betonové nádrže armaturní šachty čerpací stanice splaškových vod za technologicky a kvalitativně stejnou. 
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 4 a 5 viz příloha č. 2 dodatku. 

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč	

Cena sjednaná v SoD pro část 1 
	11 107 787,75	2 332 635,43	13 440 423,18	

Cena sjednaná v SoD pro část 2
	849 604,86	178 417,02	1 028 021,88	
Cena sjednaná v SoD celkem 	11 957 392,61	2 511 052,45	14 468 445,06	
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 1	9 879 561,15	2 074 707,84	11 954 268,99	
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46	
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45	
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 1	9 879 561,15	2 074 707,84	11 954 268,99	
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46	
Cena díla dle Dodatku č.2 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45	

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3 pro část 1	132 641,14	27 854,64	160 495,78	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3 pro část 1	-115 290,03	-24 210,90	-139 500,93	
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 3 pro část 1	17 351,11	3 643,74	20 994,85	
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 1	9 896 912,26	2 078 351,58	11 975 263,84	
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 2	886.170,63	186.095,83	1.072.266,46	
Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem	10 783 082,89	2 264 447,41	13 047 530,30	

1.3.	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to: 
Dle dodatku č. 2 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:
a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnového listu č. 4, když potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných změn materiálů a postupů a odpočet prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v rozsahu všech doposud prováděných dodatečných a neprováděných prací představuje 24,71 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 10,11 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
b)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového listu č. 5, když se jedná o záměnu položek dle soupisu prací za kvalitativně stejné položky bez vlivu na navýšení ceny.
** Dle § 222 odst. 7 ZZVZ platí, že  Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).  

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě
-1 174 309,72 Kč, což činí - 9,82 %.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 107. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 31.5.2022

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
příloha č. 2 – Změnové listy č. 4 a 5 

    Za objednatele:					Za zhotovitele:

    _________________________			__________________________
    Petr Korč						Ing. Tomáš Svetko
    primátor                                                           jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.