číslo smlouvy objednatele: S/0501/2018/IO			číslo smlouvy zhotovitele: 841/OBDE/255/2018
	
DODATEK Č. 5

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0501/2018/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem - primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxx/ xxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx – pověřená vedením investičního odboru
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxx

xxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxx/email: xxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a

STRABAG a.s. 
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena Ing. Klárou Kalábovou – ekonomem Oblasti Střed, o.z. Morava
                    tel: xxxxxxx / email: xxxx
                    Ing. Vítězslavem Bujnochem – vedoucím OTÚ Oblasti Střed, o.z. Morava
                    Tel: xxxxx / email: xxxxxxxxx
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 7634
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 8yuchp8
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxx – vedoucí Provozní jednotky,
              tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 5 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna a to doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2018 na stavební práce pod názvem „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:
- nerealizaci části nedokončeného oplocení. 
 
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 9 viz příloha č. 2 dodatku č. 5. 

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	62 000 014,83 Kč bez DPH,
tj. 75 020 017,94 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	59 610 331,44 Kč bez DPH,
tj. 72 128 501,04 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	59 723 009,44 Kč bez DPH,
tj. 72 264 841,42 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 3	60 175 122,64 Kč bez DPH,
tj. 72 811 898,39 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č.4	60 309 209,44 Kč bez DPH,
tj. 72 974 143,42 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5	– 73 044,58 Kč bez DPH,
tj. – 88 383,94 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 5	60 236 164,86 Kč bez DPH,
tj. 72 885 759,48 Kč vč. DPH	

1.3.	Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 5 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje změnu hodnoty závazku oproti původně sjednané ceně díla o 5,84 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla. Celková změna ceny díla ve smlouvě ve znění dodatků č. 1 až 5 činí -2,96 %.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 105. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 17. 05. 2022.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 5 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 5 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 5 podle tohoto ujednání.
5.	Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 9

Za objednatele:						Za zhotovitele:
-	na základě plné moci
Ve Frýdku-Místku                                                             V Olomouci

_________________________				__________________________
Petr Korč                         				          Ing. Klára Kalábová
primátor                                              		          ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

__________________________
                                                                                           Ing. Vítězslav Bujnoch  
                                                                                vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava