DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0445/2025/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/ xxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – xxxxxx
tel.: xxxxxx/e-mail: xxxxx
 
-	dále jen objednatel 
a

HSF System SK, s.r.o.
se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina, SK
zastoupena: Ing. Tomášem Kosou a Ing. Janem Hasíkem, jednateli
IČ: 45412464
DIČ: SK2022973095
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině pod sp. zn. Oddíl s.r.o. vložka 52489/L.
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx, xxxxx/xxxxxxxx
ID datové schránky: xdhegfg
zástupce ve věcech smluvních:
				Tomáš Hess, obchodní ředitel
zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxx, 
tel:xxxxxx / email: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0445/2025/IO ze dne 13.06.2025 k veřejné zakázce „Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0445/2025/IO ze dne 13.06.2025 k veřejné zakázce „Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje v odstavci 1. a) o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č. 01, 02, 03, 04 a 05, který jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a které obsahují soupis prací včetně výkazu výměr pro následující práce a dodávky.
Dodatečné práce a dodávky představují:
-	kladnou bilanci rozdílu kubatur orniční a podorniční vrstvy při realizaci zemních a výkopových prací
-	opravu stávající vnitroareálové podzemní nízkonapěťové kabeláže, která byla poškozena během realizace výkopových prací
-	realizaci nového opláštění ze sádrokartonu vnitřního rozvodu nové přípojky vody
-	realizaci revizní jímky v místnosti 1.19 „Technická místnost“ pro přípojku horkovodu
-	záměnu interiérových vápenocementových dvouvrstvých štukových omítek za jednovrstvé sádrové
Neprováděné práce a dodávky zahrnují:
-	zápornou bilanci rozdílu kubatur orniční a podorniční vrstvy při realizaci zemních a výkopových prací

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	87 878 487,08 Kč	18 454 482,29 Kč	106 332 969,37 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	1 420 958,12 Kč	298 401,20 Kč	1 719 359,32 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-1 341 500,20 Kč	- 281 715,04 Kč	-1 623 215,24 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	79 457,92 Kč	16 686,16 Kč	96 144,08 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 1	87 957 945,00 Kč	18 471 168,45 Kč	106 429 113,45 Kč	

1.3.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny:
a)	dílem podle ust. § 222 odst. 6* ZZVZ* ve spojení s ust. § 222 odst. 9** v rozsahu změnového listu č. 01, 02, 03, 04, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 0,09 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
b)	dílem podle ust. § 222 odst. 7*** ZZVZ  v rozsahu předloženého změnového listu č. 05, za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami 
* § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

** § 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

*** § 222 odst. 7 ZZVZ – Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
a)	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b)	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c)	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d)	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatku č. 1 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 0,09 %.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 91. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 02.12.2025.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku        					Ve Frýdku-Místku
                                                      
_______________________		                                 __________________________
            Petr Korč                                                                  Ing.Tomáš Kosa, Ing.Jan Hasík
             primátor                                                                                 jednatelé